ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
33601 , м. Рівне,  вул. Яворницького, 59

П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2024 року                                                                                      Справа № 903/759/24 

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючий суддя Маціщук А.В.
                      суддя Бучинська Г.Б.
                      суддя Василишин А.Р.

розглянувши у порядку письмового провадження апеляційну скаргу відповідача Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" в особі філії "Любешівське лісомисливське господарство"
на рішення Господарського суду Волинської області від 02.10.2024 р.
постановлене у м. Луцьк, повний текст складено 03.10.2024 р.
у справі № 903/759/24 (суддя Вороняк А.С.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Західземлепроект"
до відповідача Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" в особі філії "Любешівське лісомисливське господарство"
про стягнення 254200,00 грн. заборгованості

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до рішення від 02.10.2024 р. Господарський суд Волинської області задоволив позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Західземлепроект" у справі       № 903/759/24. Згідно з рішенням суду підлягає стягненню з Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" в особі філії "Любешівське лісомисливське господарство" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Західземлепроект" 254200,00 грн. заборгованості.
Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, відповідач Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" в особі філії "Любешівське лісомисливське господарство" подав апеляційну скаргу, у якій просить оскаржуване рішення скасувати, прийняти нове рішення та відмовити у позові.
Вважає оскаржуване рішення необґрунтованим та таким, що прийняте із процесуальними порушеннями і містить неправильне застосування норм матеріального права.
Звертає увагу, що відповідач у поданому відзиві зазначав про те, що починаючи з 01.07.2022 р. і по сьогодні ТОВ «Західземлепроект» ні Державному підприємству «Любешівське лісомисливське господарство» ні філії «Любешівське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» жодного рахунку-фактури для оплати за виконані роботи виставлено не було. При цьому непослідовною вважає позицію позивача щодо порушення відповідачем умов п.3.1 договору, за умовами якого усі оплати здійснюються на підставі виставленого рахунку – фактури, що підписується обома сторонами на умовах відтермінування платежу протягом не більше 10 календарних днів, оскільки жодного такого рахунку – фактури виставлено не було.
Вважає, що така обставина є підтвердженням відсутності факту виконання робіт у встановлені строки.
Стверджує, що не здійснено справедливого, із врахуванням положень п.7.2. розділу VII договору, розрахунку за послуги, як наслідок, не має факту прострочення відповідачем оплати виконаних робіт.
Просить скасувати рішення Господарського суду Волинської області від 02.10.2024 р. у справі № 903/759/24 і ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову ТОВ «Західземлепроект» відмовити повністю.

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "Західземлепроект" подав відзив та вважає, що в матеріалах справи достатньо доказів на підтвердження обставин, про які стверджує позивач, та наведено правове обґрунтування для залишення рішення про задоволення позову без змін. Відповідач у відзиві та апеляційній скарзі ні фактичних, ні юридичних підстав позову не спростовує.
Просить рішення Господарського суду Волинської області від 02.10.2024 р. . у справі № 903/759/24 залишити без змін, а апеляційну скаргу ДСГП «Ліси України» в особі філії «Любешівське лісомисливське господарство» – без задоволення.

Відповідно до ст. 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження. Апеляційні скарги на рішення господарського суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.
Враховуючи те, що ціна позову у даній справі не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і сторони не подавали клопотань про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін, розгляд апеляційної скарги відбувся в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами згідно з ч.13 ст.8 ГПК України.
Колегія суддів звертає увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Розглянувши апеляційну скаргу, вивчивши матеріали справи, наявні в ній докази, перевіривши оцінку обставин справи та повноту їх встановлення судом першої інстанції, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції при винесенні оскаржуваного судового рішення норм матеріального і процесуального права, колегія суддів Північно-західного апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.
Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено наступне.
01.07.2022 р. Державне підприємство “Любешівське лісомисливське господарство”/замовник та Товариство з обмеженою відповідальністю “Західземлепроект”/виконавець уклали договір № 121 на виконання робіт (послуг) із землеустрою /а.с.65-66 у т.1/.
Відповідно до п. 1.1, 1.2, 2.1 договору виконавець зобов`язується виконати для замовника роботи (послуги), зазначені в п.1.2. даного договору, а замовник – прийняти і оплатити такі роботи (послуги). Найменування робіт (послуг): виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості (в натурі) орієнтовною площею 507,0000 га згідно додатку № 2 до цього договору. Виконавець виконує замовникові роботи (послуги), а замовник сплачує за виконані роботи (послуги) за цінами, що визначені у протоколі погодження договірної ціни (дод. № 1).
Згідно з п. 2.2 договору ціна договору по виготовленню технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості (в натурі) становить 126750,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 21125,00 грн., по твердих розцінках, діючих на день підписання договору. 
У п. 3.1 договору визначено, що розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі виставленого рахунку-фактури та актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), що підписуються обома сторонами на умовах відтермінування платежу протягом не більше 10 календарних днів. 
Пунктом 4.1 договору встановлено строк виконання робіт (послуг): початок - з моменту підписання договору, закінчення – до 31.08.2022 р.
Відповідно до п. 5.1-5.3 договору приймання-передача робіт (послуг) за договором оформляється актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), який підписується сторонами. По завершенні робіт (послуг) виконавець передає замовнику результати виконаних робіт (послуг) та два примірники акта здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг). Замовник зобов`язаний протягом трьох робочих днів підписати акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) та передати його виконавцю або направити виконавцю письмові зауваження до роботи (послуги).
Відповідно до п. 7.2 договору у разі затримки надання послуг або надання не в повному обсязі виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки. Дана сума виключається із платежу наступного періоду (місяця, декади тощо). У разі якщо виконавець не погоджується із сплатою неустойки, він вправі оскаржити дії замовника у Господарському суді Львівської області.
Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.08.2022 р., а в частині розрахунків - до їх повного завершення (п. 10.1 договору).
Відповідно до п. 11.1 договору невід`ємною його частиною є додаток № 1 – протокол погодження договірної ціни та додаток № 2 – перелік документацій із землеустрою.
Протоколом погодження договірної ціни сторони підтвердили, що ними досягнуто згоди про розмір договірної ціни в сумі 126750,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 21125,00 грн /а.с. 66 зв. у т. 1/.
Додатком № 2 договору сторони узгодили перелік документації із землеустрою по земельних ділянках на території Щитинської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області орієнтовною площею 507,0000 га з цільовим призначенням: для ведення лісового господарства, вартість робіт 126750,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 21125,00 грн /а.с.67 у т.1/.
01.09.2022 р. ДП “Любешівське лісомисливське господарство” та ТОВ “Західземлепроект” уклали додаткову угоду № 1 до договору № 121 від 01.07.2022 р. /а.с. 67 зв. у т.1/. Цією угодою сторони внесли зміни до пунктів 1.2, 2.2, 4.1, 4.4 договору та до додатків № 1 та № 2, а саме:
« 1.2 Найменування робіт (послуг): виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 507,0000 га згідно з додатком № 2.
2.2 Ціна цього договору становить 253500,00 грн. 
4.1 Строк виконання робіт (послуг): початок – з моменту підписання даної додаткової угоди, закінчення – 31 грудня 2022 року.»
Протоколом погодження договірної ціни у новій редакції, сторони підтвердили досягнення згоди про розмір погодження ціни в сумі 253500,00 грн /а.с. 68 у т.1/.
Додатком № 2 договору у новій редакції, сторони узгодили перелік документації із землеустрою по земельних ділянках на території Щитинської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області орієнтовною площею 507,0000 га з цільовим призначенням: для ведення лісового господарства, вартість робіт 253500,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 42250,00 грн /а.с. 68 зв. у т.1/.
01.12.2022 р. ДП “Любешівське лісомисливське господарство” та ТОВ “Західземлепроект” уклали додаткову угоду № 2 до договору № 121 від 01.07.2022 р. /а.с. 69 у т.1/. Цією угодою сторони внесли зміни щодо банківських реквізитів (п.12), а також – до пунктів 4.1, 10.1.договору, а саме:
« 4.1. Строк виконання робіт (послуг): початок - з моменту підписання додаткової угоди до договору, закінчення - 30.06.2023 р.
10.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє по 30.06.2023 р., а в частині розрахунків - до їх повного виконання».
03.01.2023 р. Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” в особі директора філії “Любешівське лісомисливське господарство” та ТОВ “Західземлепроект” уклали додаткову угоду № 3 до договору   від 01.07.2022 р. № 121 на виконання робіт (послуг) із землеустрою про те, що на підставі п. 8 наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 28.10.2022 р. № 891 “Про припинення Державного підприємства “Любешівське лісомисливське господарство” та затвердження складу комісії”, наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 03.01.2023 р. № 12 “Про затвердження передавального акту Державного підприємства “Любешівське лісомисливське господарство” Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” є правонаступником прав та обов`язків Державного підприємства “Любешівське лісомисливське господарство”/а.с. 69 зв. - 70 у т.1/.
Відповідно до зазначеної додаткової угоди були внесені зміни у преамбулу договору та у розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін».
Правонаступництво ДП “Любешівське лісомисливське господарство” у Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” та дані про відокремлений підрозділ філію “Любешівське лісомисливське господарство” підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.02.2024 р. /а.с. 15 – 62 у т.1/.
03.07.2023 р. Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” в особі директора філії “Любешівське лісомисливське господарство” та ТОВ “Західземлепроект” уклали додаткову угоду № 4 до договору на виконання робіт (послуг) із землеустрою № 121 від 01.07.2022 р. /а.с.70 зв. у т.1/. Цією угодою сторони внесли зміни до пунктів 4.1, 10.1. договору, а саме:
« 4.1. Строк виконання робіт (послуг): початок - з моменту підписання додаткової угоди до договору, закінчення - 31.12.2023 р.
10.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє по 31.12.2023 р., а в частині розрахунків - до їх повного виконання».
Договір з додатками та додаткові угоди до нього підписані уповноваженими сторонами та завірені печатками юридичних осіб.
Крім того, 01.07.2022 р. Державне підприємство “Любешівське лісомисливське господарство”/замовник та Товариство з обмеженою відповідальністю “Західземлепроект”/виконавець уклали договір № 123 на виконання робіт (послуг) із землеустрою /а.с.72-73 у т.1/.
Відповідно до п. 1.1, 1.2, 2.1 договору виконавець зобов`язується виконати замовникові роботи (послуги), зазначені в п.1.2. даного договору, а замовник – прийняти і оплатити такі роботи (послуги). Найменування робіт (послуг): виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості (в натурі) орієнтовною площею 589,0000 га згідно додатку № 2 до цього договору. Виконавець виконує замовникові роботи (послуги), а замовник сплачує за виконані роботи (послуги) за цінами, що визначені у протоколі погодження договірної ціни (дод.№ 1).
Згідно з п. 2.2 договору ціна договору по виготовленню технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості (в натурі) становить 147250,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 24511,67 грн, по твердих діючих на день підписання договору, розцінках.
Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі виставленого рахунку-фактури та актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), що підписуються обома сторонами на умовах відтермінування платежу протягом не більше 10 календарних днів (п. 3.1 договору).
Пунктом 4.1 договору встановлено строк виконання робіт (послуг): початок - з моменту підписання договору, закінчення – до 31.08.2022 р.
Відповідно до п. 5.1-5.3 договору, приймання-передача робіт (послуг) за договором оформляється актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), який підписується сторонами. По завершенні робіт (послуг) виконавець передає замовнику результати виконаних робіт (послуг) та два примірники акта здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг). Замовник зобов`язаний протягом трьох робочих днів підписати акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) та передати його виконавцю або направити виконавцю письмові зауваження до роботи (послуги).
Відповідно до п. 7.2 договору у разі затримки надання послуг або надання не в повному обсязі виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки. Дана сума виключається із платежу наступного періоду (місяця, декади, тощо). У разі якщо виконавець не погоджується із сплатою неустойки, він вправі оскаржити дії замовника у Господарському суді Львівської області.
Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.08.2022 р., а в частині розрахунків - до їх повного завершення (п. 10.1 договору).
Відповідно до п. 11.1 договору невід`ємною його частиною є додаток № 1 – протокол погодження договірної ціни та додаток № 2 – перелік документацій із землеустрою.
Протоколом погодження договірної ціни, сторони підтвердили, що між ними досягнуто згоди про розмір договірної ціни в сумі 147250,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 24541,67 грн /а.с.73 зв. у т.1/.
Додатком № 2 договору сторони узгодили перелік документації із землеустрою по земельних ділянках на території Малоглушанського старостинського округу Камінь-Каширського району Волинської області орієнтовною площею 589,0000 га з цільовим призначенням: для ведення лісового господарства /а.с. 74 у т.1/.
01.09.2022 р. ДП “Любешівське лісомисливське господарство” та ТОВ “Західземлепроект” уклали додаткову угоду № 1 до договору № 123 від 01.07.2022 р. /а.с. 74 зв. у т.1/. Цією угодою внесли зміни до пунктів до пунктів 1.2, 2.2, 4.1, 4.4 договору та до додатків № 1 та № 2, а саме:
« 1.2 Найменування робіт (послуг): виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 587,0000 га згідно з додатком № 2.
2.2 Ціна цього договору становить 294500,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 49083,33 грн.
4.1 Строк виконання робіт (послуг): початок – з моменту підписання даної додаткової угоди, закінчення – 31 грудня 2022 року.»
Протоколом погодження договірної ціни у новій редакції, сторони підтвердили досягнення згоди про розмір погодження ціни в сумі 294500,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 49083,33 грн (додаток № 1 до договору) /а.с.75 у т.1/.
Додатком № 2 договору у новій редакції, сторони узгодили перелік документації із землеустрою по земельних ділянках на території Малоглушанської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області орієнтовною площею 589,00 га з цільовим призначенням: для ведення лісового господарства, вартість робіт 294500,00 грн, в т.ч. 20% ПДВ – 49083,33 грн /а.с.75 зв. у т.1/.
01.12.2022 р. ДП “Любешівське лісомисливське господарство” та ТОВ “Західземлепроект” уклали додаткову угоду № 2 до договору № 123 від 01.07.2022 р. /а.с. 76 у т.1/. Цією угодою сторони внесли зміни щодо банківських реквізитів (п.12), а також – до пунктів 4.1, 10.1.договору, а саме:
« 4.1. Строк виконання робіт (послуг): початок - з моменту підписання додаткової угоди до договору, закінчення - 30.06.2023 р.
10.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє по 30.06.2023 р., а в частині розрахунків - до їх повного виконання».
03.01.2023 р. Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” в особі директора філії “Любешівське лісомисливське господарство” та ТОВ “Західземлепроект” уклали додаткову угоду № 3 до договору   від 01.07.2022 р. № 123 на виконання робіт (послуг) із землеустрою про те, що на підставі п. 8 наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 28.10.2022 р. № 891 “Про припинення Державного підприємства “Любешівське лісомисливське господарство” та затвердження складу комісії”, наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 03.01.2023 р. № 12 “Про затвердження передавального акту Державного підприємства “Любешівське лісомисливське господарство” Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” є правонаступником прав та обов`язків Державного підприємства “Любешівське лісомисливське господарство”/а.с. 76 зв. – 77 у т.1/.
Відповідно до зазначеної додаткової угоди були внесені зміни у преамбулу договору та у розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін».
03.07.2023 р. Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” в особі директора філії “Любешівське лісомисливське господарство” та ТОВ “Західземлепроект” уклали додаткову угоду № 4 до договору на виконання робіт (послуг) із землеустрою № 123 від 01.07.2022 р. /а.с. 77 зв. у т.1/. Цією угодою сторони внесли зміни до пунктів 4.1, 10.1. договору, а саме:
« 4.1. Строк виконання робіт (послуг): початок - з моменту підписання додаткової угоди до договору, закінчення - 31.12.2023 р.
10.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє по 31.12.2023 р., а в частині розрахунків - до їх повного виконання».
Договір з додатками та додаткові угоди до нього підписані уповноваженими сторонами та завірені печатками юридичних осіб.
Відповідно до акту № 1 від 18.04.2024 р. здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) по договору № 121 від 01.07.2024 р. на суму 253500,00 грн /а.с. 71 у т.1/ та акту № 2 від 18.04.2024 р. здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) по договору № 123 від 01.07.2024 р. на суму 700,00 грн. замовник Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» прийняв виконані роботи. У актах зазначено, що документація відповідає умовам договорів, належним чином оформлена і передана замовнику /а.с. 64 у т.1/. Акти підписані представниками сторін і скріплені їх печатками.
Оплата за виконанні роботи (послуги) не виконана, доказів сплати відповідачем позивачеві 254200,00 грн вартості виконаних робіт (наданих послуг) суду не надано.
Отже, на умовах договорів № 121 від 01.07.2024 р. та № 123 від 01.07.2024 р. між сторонами відбулись правовідносини з підряду, які врегульовані нормами глави 61 ЦК України.
Згідно ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
Відповідно до ст. 843 ЦК України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.
Згідно ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.
Стаття 853 ЦК України визначає, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.
Відповідно до ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Згідно ст. 193 ГК України, ст.ст. 526, 527, 530 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор – прийняти виконання, якщо інше не встановлено законом або договором, не випливає із суті зобов`язання. Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Отже, факт надання послуг на загальну суму 254200,00 грн. підтверджений первинними документами – актами здачі приймання виконаних робіт (наданих послуг), які підписані уповноваженими представниками сторін та засвідчені їхніми печатками. Акти мають необхідні реквізизи відповідно до п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р.     № 88, зареєстрованого Мінюстом України 05.06.95 р. за № 168/704 /далі по тексту – Положення/, тому є належними доказами того, що фактично відбулась господарська операція з виконання послуг, і, відповідно – є доказами зобов`язання відповідача перед позивачем за ст.509 ЦК України та ст.ст.173-174,193 ГК України. 
Умовами п. 3.1 договорів сторони погодили, що розрахунки здійснюються на підставі виставленого рахунку-фактури та актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг)  протягом не більше 10 календарних днів після підписання актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг). 
Таким чином, строк оплати чітко визначений у п. 3.1 договору - протягом не більше 10 календарних днів після підписання актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг). Підставою для виконання оплати є рахунки та акти, що не підміняє (і не відміняє) умову про погоджений сторонами строк виконання оплати. 
Тому заперечення скаржника про те, що позивачем/виконавцем рахунок на оплату не виставлявся, тому строк оплати не настав, колегія суддів відхиляє як безпідставні. Судом першої інстанції правильно встановлено, що за умовами договорів акти здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 1 від 18.04.2024 р. на суму 253500,00 грн. та № 2 від 18.04.2024 р. на суму 700,00 грн. /а.с. 64, 71 у т.1/ підписані обома сторонами і є підставою для виконання розрахунків у визначені строки.
Колегія суддів враховує, що за своєю правовою природою рахунок на оплату товару (рахунок-фактура) не є первинним документом, а є документом, який містить тільки платіжні реквізити, на які потрібно перераховувати грошові кошти як оплату за надані послуги, тобто, носить інформаційний характер. Ненадання рахунку не є відкладальною умовою у розумінні норм статті 212 ЦК України та не є простроченням кредитора у розумінні статті 614 ЦК України, а тому не звільняє відповідача від обов`язку оплатити товар.
Така правова позиція є сталою в судовій практиці і викладена в постановах Верховного Суду від 28.09.2018 р. у справі № 910/32579/15, від 22.05.2018 р. у справі № 923/712/17, від 21.01.2019 р. у справі № 925/2028/15, від 02.07.2019 р. у справі № 918/537/18, від 29.08.2019 р. у справі № 905/2245/17, від 26.02.2020 р. у справі № 915/400/18, від 29.04.2020 р. у справі                № 915/641/19, від 07.09.2022 р. у справі № 914/1185/20, від 06.06.2023 р. у справі № 908/153/21, від 28.05.2024 р. у справі № 905/51/23. Такі правові висновки Верховного Суду враховуються колегією суддів відповідно до ч.6 ст.13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», ч.4 ст.236 ГПК України.
Звертається увага, що банківські реквізити визначені умовами договору (із відповідними змінами до п.12), тоді як належна до оплати вартість послуги визначена і погоджена сторонами шляхом підписання актів. Тобто – невиконання оплати за таких обставин не відповідає умовам договору і є недобросовісною поведінкою.
Посилання відповідача/скаржника на положення п 7.2. розділу VII договорів та твердження про те, що жодним документом, на які посилався позивач, не здійснено справедливого розрахунку за послуги, із врахуванням таких положень колегія суддів оцінює як безпідставні, оскільки п. 7.2. договорів передбачено сплату пені виконавцем/замовником у разі затримки надання послуг або надання таких послуг не в повному обсязі. Відповідач підписав акти без зауважень, тоді як факт затримки виконання робіт за договорами має бути доведений, зокрема, шляхом подання зустрічного позову тощо. Натомість, як зазначено вище, відповідач такі вимоги не пред`являв, але прийняв відповідні роботи із зазначенням про те, що документація відповідає умовам договорів, належним чином оформлена і передана йому та не виклав будь яких інших заперечень, що підтверджується актами здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 1 від 18.04.2024 р. та № 2 від 18.04.2024 р. /а.с. 64, 71 у т.1/.
Підсумовуючи вищевикладене, суд апеляційної інстанції не встановив підстав для скасування чи зміни рішення   Господарського суду Волинської області від 02.10.2024 р. у справі № 903/759/24 про задоволення позовних вимог. Доводи апеляційної скарги не спростовують обґрунтованих висновків суду першої інстанції.
Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покладаються на скаржника згідно зі  ст.129 ГПК України.
Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 276, 281, 282 Господарського процесуального кодексу України, суд
                              
П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу відповідача Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" в особі філії "Любешівське лісомисливське господарство" залишити без задоволення, рішення Господарського суду Волинської області від 02.10.2024 р. у справі            № 903/759/24 залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена у касаційному порядку визначеному Господарським процесуальним кодексом України.
Справу № 903/759/24 повернути Господарському суду Волинської області.

Головуючий  суддя                                                                      Маціщук А.В. 

Суддя                                                                                              Бучинська Г.Б.  

Суддя                                                                                              Василишин А.Р.