ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,
e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ 03499916 

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 р. 	м. Житомир 	Справа № 906/1657/25 	

Господарський суд Житомирської області у складі:
судді Вельмакіної Т.М. 
секретар судового засідання: Андрощук О.М.
за участю представників сторін:
від позивача: Дячок О.М. - довіреність №08/32580 від 26.12.2023; 
від відповідача: не прибув, 

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу
за позовом Акціонерного товариства "Житомиробленерго" 
до Лугинської селищної ради Житомирської області 
про стягнення 719094,00 грн 

Акціонерне товариство "Житомиробленерго" звернулося до суду з позовом до Лугинської селищної ради Житомирської області про стягнення 719094,00 грн вартості наданої послуги з приєднання.
Ухвалою від 19.12.2025 суд відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, призначив судове засідання для розгляду справи по суті на 19.01.2026.
19.01.2026 представник позивача подав до суду клопотання про долучення до матеріалів справи акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2024 по 30.09.2025.
Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві. На запитання суду пояснив, що відповідач обізнаний про розгляд справи та не заперечує існування боргу.
Відповідач відзив на позовну заяву не подав, повноважного представника у судове засідання не направив, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить довідка про доставку 19.12.2025 електронного листа до електронного кабінету Лугинської селищної ради Житомирської області (а.с.28). 
Враховуючи те, що подання відзиву на позовну заяву є правом, а не обов`язком відповідача, та те, що явка відповідача у судове засідання обов`язковою судом не визнавалась, а неподання відповідачем відзиву на позовну заяву та неявка відповідача в засідання суду не перешкоджає розгляду справи по суті, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності відповідача за наявними у справі матеріалами.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов`язань за Типовим договором про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" в частині оплати за надані позивачем послуги нестандартного приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу в розмірі 719094,00 грн.
Матеріали справи не містять відзиву чи будь-якої іншої заяви відповідача, в яких було б викладено процесуальну позицію останнього з приводу заявленого позову.
Оцінивши в сукупності матеріали справи, проаналізувавши вимоги чинного законодавства, що регулює спірні правовідносини, господарський суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, 03.12.2024 Лугинська селищна рада (замовник, відповідач) звернулася до Акціонерного товариства "Житомиробленерго" (виконавець, позивач) із заявою №2046-151/ТУ про приєднання до електроустановки певної потужності об`єкта "Нове будівництво спортзалу в Лугинському ліцеї №2 Лугинської селищної ради за адресою: вул. Церковна, 12, селище Лугини Коростенського району Житомирської області" (а.с.7-8).
Відповідно до п.4.1.2 Кодексу систем розподілу, послуга з нестандартного приєднання надається на підставі типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за відповідною типовою формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу (далі - договір про нестандартне приєднання), крім приєднання згідно з пунктами 4.1.11.1 та 4.1.11.2 глави 4.1 цього розділу.
Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї (п. 4.5.6. Кодексу).
Таким чином, типовий договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" між сторонами вважається укладеним 03.12.2024.
Пунктом 2.1 договору (https://www.ztoe.com.ua/explanatories/aboutconnection.php) визначено, що за цим договором виконавець забезпечує надання послуги з приєднання електроустановок об`єкта замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору.
Замовник оплачує виконавцю вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору (п.2.2 договору).
Відповідно до п.3.1 договору виконавець послуг зобов`язаний:
- надати замовнику розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання;
- надати Технічні умови;
- розпочати приєднання об`єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу після оплати замовником послуги з приєднання відповідно до вимог цього договору;
- забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом.
- здійснити первинне підключення електроустановок замовника з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника та підключити електроустановки замовника до електричних мереж системи розподілу після повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання впродовж 5 робочих днів після отримання заяви замовника або впродовж 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів, після виконання сторонами умов цього договору та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів).
Згідно з пп.3.2.1 договору, замовник зобов`язаний оплатити на умовах цього договору вартість наданих виконавцем послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж системи розподілу в точці приєднання.
Відповідно до п.4.1 договору, замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок виконавця в такому порядку:
- оплата в розмірі 50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання потужності упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;
- оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата 90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж 
5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проєктної документації;
- остаточний розрахунок плати упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується повідомленням про надання послуги з приєднання. 
Пунктом 4.3 договору передбачено, що за домовленістю сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з приєднання (шляхом укладання додаткової угоди).
Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР Замовнику відповідно до пункту 4.8.2 глави 4.8 розділу IV Кодексу повідомленням про надання послуг з приєднання.
Повідомлення про надання послуги з приєднання надається Замовнику ОСР не пізніше ніж на третій робочий день після завершення будівельно-монтажних робіт та/або подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення замовника (п.6.1 договору).
За умовами п.8.1-8.5 договору, цей договір набирає чинності з дати подання належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї, і діє до закінчення строку надання послуги з приєднання, визначеного Кодексом. Строк цього договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі сторін у порядку, встановленому чинним законодавством. Цей договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі невиконання сторонами своїх зобов`язань. Цей договір вважається розірваним, якщо замовник не оплатив послугу з приєднання протягом 20 днів з дня отримання рахунку, а технічні умови такими, що не набрали чинності. 
Відповідно до п.9.1-9.2 договору, умови цього договору можуть бути змінені в частині строків та порядку оплати послуги з приєднання сторонами, які оформляються додатковими угодами до нього.
Усі зміни та доповнення до цього договору оформлюються сторонами письмово в паперовій формі та підписуються уповноваженими особами обох сторін.
Цей договір може бути змінений у разі внесення змін або скасування нормативно-правових актів, що регулюють питання приєднання. У такому випадку сторони погоджуються з тим, що виконавець вносить відповідні зміни до цього договору та оприлюднює їх на власному вебсайті. Якщо замовник не ініціював розірвання цього договору протягом одного місяця з дня оприлюднення змін до нього, вважається, що замовник погодився зі змінами з дати його оприлюднення на офіційному вебсайті виконавця.
Згідно з п.4.3.1 Кодексу систем розподілу, ОСР надає послугу з нестандартного приєднання "під ключ" або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов договору про нестандартне приєднання, невід`ємним додатком до якого є технічні умови, що викладаються за формою, наведеною в додатку 8 до цього Кодексу.
Відповідно до п.4.3.6 Кодексу систем розподілу, ОСР проводить розрахунок вартості плати за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" до електричних мереж відповідно до Методики (порядку) формування плати за приєднання.
ОСР надає замовнику рахунки на сплату плати за приєднання в такому порядку:
- у розмірі 50 відсотків складової плати за приєднання потужності, визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;
- у розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та 90 відсотків вартості лінійної частини приєднання, визначених у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання рахунку, який ОСР надає замовнику упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої проєктної документації;
- залишку вартості плати за приєднання потужності та лінійної частини приєднання разом з повідомленням про надання послуги з приєднання. Замовник сплачує отриманий рахунок на поточний рахунок ОСР упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання повідомленням про надання послуги з приєднання.
За домовленістю сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з приєднання шляхом укладання додаткової угоди.
Згідно з п.4.4.6 Кодексу систем розподілу, для нестандартного приєднання "під ключ" ОСР направляє замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу технічні умови на приєднання разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату плати за приєднання.
Як вбачається з матеріалів справи, 22.01.2025 відповідачу були надані Технічні умови №ТЖО-22400 від 16.12.2024 нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок спортзалу Лугинського ліцею №2 Лугинської селищної ради за адресою: Житомирська область, Коростенський район, смт. Лугини, вул. Церковна, 12, та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж АТ "Житомиробленерго" згідно технічних умов №ТЖО-22400 електроустановок об`єкта: спортзал Лугинського ліцею №2 Лугинської селищної ради за адресою: Житомирська область, Коростенський район, смт. Лугини, вул. Церковна, 12, згідно з яким повна вартість послуги становить 719094,00 грн (а.с.9-12).
Суд встановив, що 06.01.2025 відповідач звернувся до позивача з листом №39 (а.с.13), у якому просив розглянути можливість зміни процедури оплати по договору нестандартного приєднання до технічних умов ТЖО-22400 від 16.12.2024 у зв`язку з проведенням платежів через казначейські рахунки.
Матеріалами справи підтверджується те, що 25.01.2025 між Акціонерним товариством "Житомиробленерго" та Лугинською селищною радою було укладено додаткову угоду №1 до Типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" АТ "Житомиробленерго", що діє на підставі ліцензії з розподілу електричної енергії, виданої постановою НКРЕКП від 16.11.2018 №1441 Технічні умови №ТЖО-22400 від 16.12.2024 (а.с.14), згідно з якою пункти 2.1 та 4.1 договору викладено у наступній редакції:
"2.1. За цим договором виконавець забезпечує надання послуги з приєднання електроустановок спортзалу Лугинського ліцею №2 Лугинської селищної ради за адресою: вул. Церковна, 12 в селищі Лугини Коростенського району Житомирської області (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору.
4.1. На дату укладення цієї угоди плата за приєднання становить 719094,00 грн, у тому числі ПДВ 20% - 119849,00 грн.
Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок виконавця послуг у розмірі 100 відсотків плати, упродовж 5 днів, починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується підписанням сторонами двох примірників актів про надання послуги з приєднання до електричних мереж систем розподілу."
Згідно з п.4.3.3 Кодексу систем розподілу, строк надання послуги з нестандартного приєднання "під ключ", становить не більше 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно).
Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати замовником ОСР першого авансового платежу вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання "під ключ" або першого авансового платежу вартості складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання відповідно до умов договору про приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. 
Зважаючи на те, що сторони додатковою угодою №1 від 25.01.2025 погодили оплату послуги з приєднання після виконання робіт, перебіг строку для виконання зазначених робіт розпочався з дня, наступного за днем укладення цієї додаткової угоди.
Відповідно до п.4.3.1 Кодексу систем розподілу, за результатом надання послуги з приєднання ОСР надає замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу.
Суд встановив, що позивач поінформував відповідача про виконання послуги з приєднання повідомленням про надання послуги з приєднання №0027837-ВихТУ від 19.05.2025 (а.с.25).
Матеріалами справи підтверджується, що 19.05.2025 між сторонами підписано акт №22400 про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу електроустановок спортзалу Лугинського ліцею №2 по вул. Церковна, 12 у селищі Лугини Коростенського району (а.с.16), відповідно до якого виконавець послуги надав, а замовник отримав послуги із забезпечення приєднання електроустановок об`єкта замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, випробування, введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об`єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання та подана напруга в узгоджену точку приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації на загальну суму 719094,00 грн, у тому числі ПДВ 20% - 119849,00 грн. Сторони підписанням даного акту про надання послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж системи розподілу виконавця послуг підтвердили, що не мають претензій стосовно виконаних умов Типового договору про приєднання.
Суд встановив, що позивач звертався до відповідача з претензією №700/19969 від 16.06.2025 (а.с.17), у якій вимагав у термін 30 днів сплатити заборгованість за послуги нестандартного приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу в сумі 719094,00 грн.
У відповідь на вказану претензію відповідач надав позивачу гарантійний лист №1481 від 01.08.2025 (а.с.18), у якому вказано, що питання виділення коштів на проведення розрахунків буде розглянуто в жовтні поточного року при розгляді питання виконання бюджету за 9 місяців поточного року та внесення змін до місцевого бюджету та те, що відповідач гарантує проведення розрахунків за виконані роботи до 01.12.2025. 
30.09.2025 між сторонами був підписаний акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2024 по 30.09.2025 (а.с.30), згідно з яким заборгованість відповідача перед позивачем становить 719094,00 грн.
За приписами статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).
Частиною 1 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію.
Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
З огляду на положення типового договору та додаткової угоди №1 від 25.01.2025 останнім днем строку оплати наданих позивачем послуг було 27.05.2025 (з урахуванням вихідних днів згідно приписів ч.5 ст. 254 ЦК України).
Доказів сплати відповідачем вказаної заборгованості матеріали справи не містять.
Оскільки, станом на час розгляду справи в суді, відповідач не сплатив позивачу 719094,00 грн за надану послугу з нестандартного приєднання до електричних мереж, позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
За приписами статей 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Згідно зі ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Відповідно до ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі на загальну суму 719094,00 грн вартості наданої послуги з приєднання.
З огляду на задоволення позовних вимог, судовий збір відповідно до ст.129 ГПК України покладається на відповідача.
Керуючись статтями 2, 73-79, 86, 123, 129, 233, 236-238, 241, 247 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ: 

1. Позов задовольнити.
2. Стягнути з Лугинської селищної ради (11301, Житомирська область, Коростенський район, селище міського типу Лугини, вул. Грушевського Михайла, будинок 2А, ід. код 04346114) на користь Акціонерного товариства "Житомиробленерго" (10008, Житомирська область, місто Житомир, вул. Косенка Віктора, будинок 32/8, ід. код 22048622):
- 719094,00 грн вартості наданої послуги з приєднання;
- 8629,13 грн витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. 
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено: 22.01.26 

Суддя Вельмакіна Т.М. 

1 - до справи;
- позивачу та відповідачу - через "Електронний суд".