ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
================================================================

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2026 року Справа № 915/2085/25 
м.Миколаїв
Господарський суд Миколаївської області, у складі судді Семенчук Н.О.,
розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін у судове засідання за наявними матеріалами справу
за позовом: Акціонерного товариства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"
електронна адреса: office@zorya.com.ua
до відповідача: Приватного виробничо-налагоджувального підприємства "Нікоінтерм"
електронна пошта: nikointerm2003@gmail.com
про:  стягнення 232 754,70 грн. 

Акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" звернулось до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою №10-6352 від 10.12.2025 (вх.№17607/25 від 10.12.2025) про стягнення з Приватного виробничо-налагоджувального підприємства "Нікоінтерм" пені у сумі 232 754,70 грн. за Договором про закупівлю №12995 від 25.06.2024.
В обґрунтування позову посилається на неналежне виконання відповідачем своїх обов`язків по Договору про закупівлю №12995 від 25.06.2024 в частині своєчасної поставки товару.
Позивач у позовній заяві просить суд здійснити розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження. 
Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 15.12.2025 позовну заяву №10-6352 від 10.12.2025 (вх.№17607/25 від 10.12.2025) Акціонерного товариства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" залишено без руху. Вказаною ухвалою позивачу надано строк для усунення недоліків, який не перевищує 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.
Позивач через систему "Електронний суд" подав заяву про усунення недоліків №б/н від 25.12.2025 (вх.№18860/25 від 25.12.2025). 
Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 26.12.2025 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін у судове засідання за наявними матеріалами. Ухвалено провести розгляд справи №915/2085/25 поза межами встановленого ГПК України строку у розумний строк, тривалість якого визначається з урахуванням існування в Україні воєнного стану. Встановлено учасникам справи строк для надання заяв по суті справи. 
Вказана ухвала була направлена в електронний кабінет відповідача системи «Електронний суд» та отримана останнім 26.12.2025, про що свідчить довідка про доставку документа в кабінет електронного суду, яка наявна в матеріалах справи. 
Відповідач своїм правом у визначений судом строк на подання відзиву на позов оформлений згідно вимог ст.165 ГПК України разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача не скористався. 
Відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.
Згідно із частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.
Розглянувши матеріали справи, дослідивши та оцінивши усі подані у справу докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд встановив наступне.
25 червня 2024 року між Акціонерним товариством "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (далі - позивач, покупець) та Приватним виробничо-налагоджувальним підприємством "Нікоінтерм" (далі - відповідач, постачальник) було укладено Договір про закупівлю №12995 (далі - Договір), у відповідності до умов якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, поставити покупцю водогрійну котельну установку в комплекті (триходовий жаротрубно-димогарний котел потужністю 19 200 кВт з газовим пальником у комплекті), відповідно до ДК 021:2015-42160000-8 «Котельні установки» (далі - обладнання), зазначену в Специфікації №1 (Додаток №2) та технічній специфікації (Додаток №1) до Договору і надати послуги з монтажу та пусконалагоджувальних робіт (Додаток №3), а покупець зобов`язаний прийняти та оплатити поставлене обладнання, надані послуги в порядку та строки, передбачені даним Договором (п.1.1 Договору).
У відповідності до п.1.2 Договору, загальна кількість обладнання, що підлягає поставці, по сортам, групам, підгрупам, видам, маркам, типам розміром та перелік (найменування) послуг, а також основні вимоги до них, визначаються Технічною специфікацією (Додаток №1), Специфікацією №1 (Додаток №2), Проектною документацією №2020/80, Порядком надання послуг з монтажу та пусконалагоджувальних робіт (Додаток №3) та Договірною ціною на надання послуг (Додаток №4). 
Згідно п.3.4 Договору, обладнання поставляється в наступні строки: 154 календарних дні, що складає 22 тижні від дати перерахування покупцем передоплати у розмірі 20%, згідно п.5.2 Договору, з можливістю дострокової поставки. 
Відповідно до п.3.5 Договору, постачальник зобов`язаний письмово повідомити покупця про дату готовності обладнання до відвантаження не пізніше ніж за 5 днів до цієї їдати. 
Пунктом 3.14 Договору визначено, що поставка обладнання здійснюється на підставі та у відповідності до підписаної сторонами Специфікації №1 (Додаток №2) та Технічній специфікації (Додаток №1).
У відповідності до п.4.1 Договору, поставка обладнання, надання послуг здійснюється за цінами, які визначені у Специфікації №1 (Додаток №2) та Договірній ціні на надання послуг (Додаток №4) та Додатком №3 і включають всі податки, збори й інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, пакування, маркування й інші видатки постачальника, пов`язані з поставкою обладнання, надання послуг. 
Згідно п.4.2 Договору, ціна договору становить 32 074 861,36 грн. в тому числі ПДВ 5 345 810,23 грн., що складається з: 
- ціни обладнання в розмірі 25 509 503,87 грн., в тому числі ПДВ 4 251 583,98 грн.,
що в еквіваленті, на дату подачі пропозиції 14.05.2024 відповідно до офіційного курсу НБУ гривні до євро (42,7495 за 1 євро) становить 596 720,52 євро;
- ціни послуг у розмірі 6 565 357,49 грн. ,в тому числі ПДВ 1 094 226,25 грн.
Ціна обладнання в еквіваленті, на дату подачі пропозиції 14.05.2024 відповідно до офіційного курсу НБУ гривні до євро, складається з суми зазначеної у Специфікації №1 (Додаток №2). Після підписання Договору сторонами, зміна грошового еквівалента ціни у EUR, зазначеного в Договорі та у Специфікації №1 (Додаток №2), не допускається. Після підписання Договору сторонами, зміна ціни послуг, зазначеної в Договорі та Договірній ціні на надання послуг (Додаток №4), не допускається. 
У відповідності до п.4.6 Договору, сторони домовились, що у випадку коливання офіційного курсу гривні відносно до валюти EUR на момент: 
- здійснення попередньої оплати, остаточного розрахунку ціни обладнання в
розмірах та на умовах, визначених п.5.2 Договору, на 2% або більше відсотків ціна обладнання в національній валюті України може бути збільшена або зменшена виключно до обладнання, що містить імпортну складову та виробником якого є нерезидент України (за виключенням оплати, здійсненої покупцем до моменту настання вказаного коливання офіційного курсу гривні відносно до валюти EUR) на відповідний відсоток збільшення або зменшення вартості валюти EUR до гривні, шляхом підписання Додаткової угоди. Офіційні курси НБУ EUR, відносно до національної валюти України та сума валюти еквівалента, зазначаються у Специфікації №1 (Додаток №1) та рахунках на оплату. Постачальник повинен документально підтвердити коливання офіційного курсу гривні відносно до валюти EUR.
Відповідно до п.5.2 Договору, оплата по даному договору здійснюється наступним чином, зокрема:
- передоплата, у розмірі 20% від ціни обладнання, згідно зі Специфікацією №1
(Додаток №2), здійснюється покупцем протягом 15 банківських днів від дати підписання Договору згідно рахунку постачальника на оплату; 
- оплата у розмірі 60% від ціни обладнання, згідно зі Специфікацією №1 (Додаток
№2), здійснюється покупцем протягом 15 банківських днів від дати письмового повідомлення постачальника про готовність до відвантаження обладнання на територію покупця на e-mail представника покупця та отримання рахунку постачальника на оплату; 
- остаточний розрахунок, у розмірі 20% від ціни обладнання, згідно зі
Специфікацією №1 (Додаток №2), здійснюється покупцем не пізніше 10 банківських днів по факту відвантаження обладнання на території покупця, підписання видаткової накладної та оформлення Акту приймання - передачі обладнання. 
У відповідності до п.6.5 Договору, приймання обладнання здійснюється сторонами і оформлюється актом приймання-передачі обладнання протягом 5 робочих днів по факту поставки обладнання на території покупця. 
Згідно п.8.3.1 Договору, постачальник зобов`язаний забезпечити своєчасну поставку обладнання, надання послуг згідно умов даного Договору. 
Пунктом 13.1 Договору визначено, що даний договір набирає чинності з дати його підписання обома сторонами та діє до 31.12.2026. Закінчення строку дії даного Договору, не звільняє сторони від виконання зобов`язань та відповідальності за порушення зобов`язань (у тому числі гарантійних) за даним Договором. 
Відповідно до п.14.2 Договору, усе листування, пересилання документів, повідомлень, заяв і претензій, пов`язаних з виконанням даного Договору, або що випливають із нього, повинні направитися сторонами безпосередньо на адреси, зазначені в даному Договорі, у відповідності зі строками й порядком, установленими чинним законодавством і даним Договором. 
Згідно п.14.7 Договору, усі зміни й доповнення до даного Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками сторін й скріплені печатками сторін. 
У відповідності до п.14.12 Договору є: 
- Технічна специфікація (Додаток №1) (п.14.12.1);
- Специфікація №1 (Додаток №2) (п.14.12.2);
- Порядок надання послуги з монтажу та пусконалагоджувальних робіт (Додаток №3) (п.14.12.3); 
- Договірна ціна на надання послуг (Додаток №4) (п.14.12.4); 
- Графік надання послуг (Додаток №5) (п.14.12.5);
- Форма банківської гарантії забезпечення виконання Договору (Додаток №6)
(п.14.12.6). 
Договір скріплений підписами та печаткою сторін.
Як вбачається з матеріалів справи між позивачем та відповідачем складено та підписано Додаток №1 до Договору «Технічна специфікація», Додаток №2 «Специфікація №1», Додаток №3 «Порядок надання послуг з монтажу та пусконалагоджувальних робіт», Додаток №4 «Договірна ціна послуги з монтажу та пусконалагоджувальних робіт», Додаток №5 «Графік надання послуг з монтажу та пусконалагоджувальних робіт», Додаток №6 «Банківська гарантія»
18 грудня 2024 року між позивачем та відповідачем складено та підписано Додаткову угоду №1 до Договору, про наступне: 
1. На підставі п.4.6 Договору та враховуючи, що на дату виставлення постачальником рахунку на оплату у розмірі 60% від ціни обладнання з імпортною складовою, відбулось коливання офіційного курсу відносно валюти EUR більше, чим 2% сторони дійшли згоди здійснити перерахунок оплати у розмірі 60% від ціни обладнання згідно офіційного курсу гривні щодо іноземної валюти Національного баку України, наступним чином: 
- 1000000, 00 грн. (що станом на 29.11.2024, по курсу 43,8626 EUR = 22798,47 EUR).
- 14657831,47 грн. (що станом на 03.12.2024, по курсу 43,7242 EUR = 335233,84 EUR).
2. Сторони дійшли згоди на підставі п.4.6 Договору внести зміни до п.4.2 Договору та викласти в наступній редакції: 
« 4.2. Ціна договору становить 32 426 990,52 грн. в тому числі ПДВ 5 404 498,42грн., що складається з: 
- ціни обладнання в розмірі 25 861 633,03 грн., в тому числі ПДВ 4 310 272,17 грн.,
що в еквіваленті відповідно до офіційного курсу НБУ гривні до євро (на дату подачі пропозиції 14.05.2024 - 42,7495 за 1 євро, нас дату оплати 60% ціни обладнання згідно п.5.2 Договору на 29.11.2024 - 43,8626 грн. за 1 євро, та на 03.12.2024 - 43,7242 за 1 євро) становить 596 720,52 євро;
- ціни послуг у розмірі 6 565 357,49 грн., в тому числі ПДВ 1 094 226,25 грн.
Ціна обладнання в еквіваленті, на дату подачі пропозиції 14.05.2024 відповідно до офіційного курсу НБУ гривні до євро, складається з суми зазначеної у Специфікації №1 (Додаток №2). Після підписання Договору сторонами, зміна грошового еквівалента ціни у EUR, зазначеного в Договорі та у Специфікації №1 (Додаток №2), не допускається. Після підписання Договору сторонами, зміна ціни послуг, зазначеної в Договорі та Договірній ціні на надання послуг (Додаток №4), не допускається».
3. Додаток №2 до Договору №12995 від25.06.2024, Специфікація №1 викласти у новій
редакції (Додаток №1 до Договору угоди №1 від 18.12.2024).
Так, між позивачем та відповідачем було складено та підписано Додаток №1 до Додаткової угоди до Договору - Додаток №2 «Специфікація №1», згідно якої постачальник зобов`язується поставити обладнання, а покупець прийняти й оплатити - водогрійну котельну установку в комплекті (триходовий жаротрубодимогарний котел BOSH UNIMAT-UT-L-64 EKO-7 потужністю 19 200 кВт з газовим пальником у комплекті) в кількості - 1 шт., за ціною 25 861 366,03 грн. з ПДВ. 
Так, 26.06.2024 відповідач надав позивачу рахунок №27 на оплату вартості обладнання на суму 5 101 900,78 грн. (20% від ціни обладнання 21 257 919,89 грн.).
Відповідач на виконання умов п.5.2 Договору, 01.07.2024 здійснив передоплату у розмірі 5 101 900,78 грн., про що свідчить платіжна інструкція №1406 від 01.07.2024 
Позивач вказує, що відповідно до п.3.4 Договору, відлік 154 денного строку поставки товару починається з 02 липня 2024 року та спливає 02.12.2024 (включно) (02.07.2024 + 154 календарні дні).
Позивач зазначає, що поставка товару за договором виконана постачальником з порушенням строку визначеного у Договорі, а саме згідно видаткової накладної №58 від 12.12.2024 на суму 25 861 633,03 грн. поставка відбулась 12.12.2024, замість 02.12.2024.
Позивачем на адресу відповідача було направлено лист №09-429 від 26.12.2024 в якому, у зв`язку з простроченням терміну поставки товару на 9 календарних днів з 03.12.2024 по 11.12.2024, пропонував сплатити пеню, відповідно до п.9.3 Договору, у сумі 232 754,70 грн. 
У відповідь, відповідач у листі №06/01 від 06.01.2025 просив не нараховувати штрафні санкції за Договором з підстав затримки поставки обладнання, зважаючи на об`єктивні обставини затримки постачання обладнання.
У подальшому, позивач направив на адресу відповідача претензію №10-5354 від 20.10.2025 в якій вимагав у 10-денний строк з дня одержання претензії сплатити пеню нараховану на підставі п.9.3 Договору у розмірі 232 754,70 грн. (25 861 633,03 грн. (ціна обладання) х 9 днів х 0,1/100).
Відповідач у відповідь на претензію, в листі №3110/6 від 31.10.2025 пропонував утриматись від застосування штрафних санкцій. 
Позивач, у зв`язку з порушенням строків поставки товару визначеного Договором звернувся до суду з даним позовом про стягнення з останнього нарахованої пені.

У відповідності до ст.509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.
Стаття 626 Цивільного кодексу України встановлює, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.
Зі змісту ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України вбачається, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Як зазначено в ч. 1 ст.628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Відповідно до ст.629 Цивільного Кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.
У відповідності ч.1 ст.202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.
Відповідно до ст.712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.
Частиною 1 ст.662 Цивільного кодексу України визначено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.
Статтею 663 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст.530 Цивільного Кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Відповідно до ст.ст.610, ч. 1 ст.612 Цивільного Кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.611 Цивільного Кодексу України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.
Стаття 549 Цивільного Кодексу України встановлює, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.
У відповідності до п.9.1 Договору, у випадку порушення строків поставки обладнання, надання послуг, постачальник сплачує покупцеві пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості обладнання, послуг, з яких допущено прострочення поставки/надання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості обладнання, послуг. Крім того, у випадку порушення строків поставки обладнання, надання послуг більш ніж на 30 календарних днів покупець має право відмовитись від подальшого приймання й оплати обладнання, послуг, а також вимагати повернення раніше сплачених коштів за обладнання, послуги, які постачальник зобов`язаний повернути протягом трьох банківських днів з моменту одержання повідомлення покупця. 
Так, позивач згідно наданого до суду розрахунку нарахував та просить суд стягнути з відповідача пеню за прострочення поставки товару на 9 днів за період з 03.12.2024 по 11.12.2024 у розмірі 0,1 % від вартості обладнання - 25 861 633,03 грн. (вартість обладнання визначена Додатковою угодою №1) у сумі 232 754,70 грн., розмір якої є обґрунтованою та підлягаю задоволенню. 
Відповідно до ч.ч.1-3 ст.13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
За умовами ч.ч.1, 2 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Частиною 1 статті 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Відповідно до ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Згідно з ст.79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Доказів того, що відповідач належним чином (своєчасно) виконував свої зобов`язання щодо поставки товару, відповідач, у порушення приписів ст.73,74 ГПК України, суду не надав, тобто не довів безпідставність позовних вимог, тоді як надані позивачем докази, як зазначалось вище, навпаки, підтверджують наявність порушених прав позивача, а відтак і обґрунтованість позовних вимог щодо стягнення пені.
Враховуючи викладене вище, позовні вимоги підлягають задоволенню.
Відповідно до ст.129 ГПК України судові витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 11, 13, 73, 74, 76-79, 86, 91, 123, 129, 210, 220, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 247, 248, 252 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:
1. Позов задовольнити. 
2. Стягнути з Приватного виробничо-налагоджувального підприємства "Нікоінтерм" (код ЄДРПОУ 32508277) на користь Акціонерного товариства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (код ЄДРПОУ 31821381) пеню у сумі 232 754,70 грн. за Договором про закупівлю №12995 від 25.06.2024 та судовий збір у розмірі 2 793,06 грн. 

Рішення суду, у відповідності до ст.241 Господарського процесуального кодексу України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України 

Суддя Н.О. Семенчук