ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2026	м. Дніпро	Справа № 904/6685/25	

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Манько Г.В. за участю секретаря судового засідання Махортової Д.Р.
за позовом Військової частини НОМЕР_1  
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСК СТАНДАРТ" 
про стягнення 137 438 грн. 62 коп. 

Представники:
від позивача: Жінчин Б.А.
від відповідача: не з`явився.
СУТЬ СПОРУ:
Військова частина НОМЕР_1 звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" неустойки за договором підряду від 07.04.2025р. №318/4Д у сумі 137 438 грн. 62 коп., у тому числі пені за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 113 536 грн. 25 коп., пені за порушення строків завершення будівництва у сумі 23 902 грн. 37 коп. та судових витрат у справі.
Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві.
Відповідач надав відзив на позов у якому просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог. 
У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення. 
Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, - 
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" та Військовою частиною НОМЕР_1 підписано договір №318/4Д на будівництво фортифікаційних споруд від 07.04.2025р. (далі Договір).
В порядку, строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами виконати Роботи з розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по об`єкту: "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №494" (далі - Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти виконані на умовах Договору роботи та оплатити їх вартість. Код ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи (п.1.1 Договору).
Роботи виконуються за етапами: I етап - Проектування: виконання вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування), розроблення проектної документації стадії "Робочий проект" (у склад якого повинен входити Генеральний план), у тому числі проходження експертизи з отриманням позитивного експертного звіту та передача Замовнику відповідно до Календарного графіку виконання робіт (додаток 4), що є невід`ємною частиною Договору. II етап - Будівельні роботи відповідно до Календарного графіку виконання робіт (додаток 4) (п. 1.4 Договору).
Вартість робіт по Договору визначена за Договірною ціною (Додаток № 1) і складає: 2 987 807,75грн. (два мільйони дев`ятсот вісімдесят сім тисяч вісімсот сім гривень 75 копійок) в тому числі ПДВ 497 967,96 грн та є складовою частиною вартості робіт по Об`єкту в межах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Об`єкта (п. 2.1 Договору).
Строки виконання робіт за цим Договором визначені Календарним графіком виконання робіт (Додаток 4) (п. 3.1 Договору).
Після закінчення виконання робіт Підрядник письмово повідомляє про це Замовника. Датою закінчення робіт за договором вважається дата підписання акту готовності Об`єкту до експлуатації, складеного уповноваженими представниками Замовника разом Із представниками Підрядника (п. 3.4 Договору).
Відповідно до статей 235, 236, 237 Господарського кодексу України,у разі порушення Підрядником господарських зобов`язань за Договором застосувати в односторонньому порядку оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу з метою припинення або попередження повторення порушень, а саме: достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Підрядника (цінний лист із описом вкладення), у разі настання однієї з таких обставин: а) Підрядник не розпочав будівництво (реконструкцію) Об`єкта протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Договору Підряду. У такому випадку підтвердженням прострочення є акт огляду будівельного майданчика, складений уповноваженими представниками Замовника разом із представниками Підрядника; б) Підрядник більше ніж на 5 (п`ять) днів порушив строк виконання основних робіт, визначених у Графіку виконання робіт, що підтверджується актом огляду будівельного майданчика, складеним уповноваженими представниками Замовника разом із представниками підрядника. Договір вважається розірваним через 5 (п`ять) календарних днів з дати отримання Підрядником письмового повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку, який направляється Замовником на адресу Підрядника (п. 4.1.1 Договору).
Замовник за Актом приймання-передачі Об`єкта передає Підряднику на період виконання робіт та до їх завершення Об`єкт (будівельний майданчик/фронт робіт) (п. 8.1 Договору).
Підрядник самостійно організовує всю роботу з виконання цього Договору відповідно до Календарного графіка виконання робіт (Додаток 4), та здотриманням вимог ДБН А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва", інших нормативних документів, які регулюють виконання будівельних робіт (п. 8.2 Договору).
Приймання та передача виконаних робіт здійснюються Сторонами поступово у міру завершення виконання видів робіт, їх частин, окремих конструктивних елементів тощо, шляхом підписання Сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (п. 10.1 Договору).
За порушення терміну початку виконання робіт по Договору (пункт 3.1. Договору), Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % (нуль цілих одну десятих відсотка) Договірної ціни за кожний день нерозпочатої роботи. У разі якщо Підрядник не розпочав роботу протягом 30 (тридцяти) календарних днів, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши Підрядника письмово (п. 13.3 Договору).
За порушення строків завершення будівництва по Договору, Підрядник сплачує Замовникові пеню у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) Договірної ціни, за кожен день такого прострочення, а за прострочення понад тридцять днів з Підрядника додатково стягується штраф на користь Замовника у розмірі семи відсотків вказаної вартості (п. 13.5 Договору).
Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02,2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року. У частині оплати - до повного виконання сторонами узятих на себе зобов`язань за цим Договором (п. 17.2 Договору).
Сторонами Договору погоджено Календарний графік виконання робіт, що є Додатком №4 до договору №318/4Д від 07.04.2025р. Умовами графіка визначено види та етапи робіт: 1 етап - Проектні роботи; Експертиза проектної документації. 2 етап - Будівля бліндажа (УФС-3); Ходи сполучення (влаштування одягу крутості і геотекстилю, сітки на металевих стійках); Місця ведення вогню; Люк; Вхід до траншеї; Відхоже місце.
Товариством з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" та Військовою частиною НОМЕР_1 укладено додаткову угоду №1 від 16.05.2025р. до договору на будівництво фортифікаційних споруд №318/4Д від 07.04.2025р. За текстом угоди: "2.1.Вартість робіт по Договору визначена за Договірною ціною (Додаток №1 до Додаткової угоди №1 від 16.05.2025 р. до Договору на будівництво фортифікаційних споруд № 318/4Д від 07.04.2025 p.), складеною на підставі локальних кошторисів до неї (Додаток №5/1-5/8 до Додаткової угоди №1 від 16.05.2025 р. до Договору № 318/4Д від 07.04.2025 p.), і складає: 2 987 796,00 грн.". Усі інші положення договору залишаються без змін.
Сторонами Договору складено та підписано без зауважень акт приймання-передачі будівельного майданчика від 08.04.2025р. до договору №318/4Д від 07.04.2025р. 
При виконанні Договору складено Експертний звіт №444/25-РБК/ЕЗ від 17 квітня 2025р. За текстом Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом. Класи наслідків (відповідальності) об`єктів - СС1 Сукупний показник - СС1. За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 "Деякі питання ціноутворення у будівництві", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва", затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.
Сторонами Договору складено та підписано Акт огляду будівельного майданчику від 07.06.2025р. За текстом Акту представниками сторін встановлено, що станом на 07.06.2025р. підрядник роботи на об`єкті "Нове будівництво фотрифікаційних споруд опорного пункту №494" не розпочав, чим порушив строки початку та виконання робіт визначених у "Календарному графіку виконання робіт" (додаток 4 до договору підряду).
Військова частина НОМЕР_1 звернулась до товариства з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" з повідомленням від 25.06.2025р. №21/100-665. За текстом повідомлення, станом на 07.06.2025р. відповідачем порушено підпункт "в" пункту 4.1.1 розділу 4 Договору, що підтверджується актом огляду будівельного майданчика, складеного уповноваженими представниками замовника (військова частина НОМЕР_1 ) та Підрядника (ТОВ "ДСК Стандарт"). Договір вважається розірваним через 5 днів з дати отримання повідомлення.
Позивач правомірно застосував умови п. 4.1, 13.3 Договору щодо його розірвання.
Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення дата подання Повідомлення про розірвання Договору - 25.06.2025р. Вказане Повідомлення ТОВ ДСК Стандарт вручено 27.06.2025р.
Під час розгляду справи встановлено, що в порушення пунктів 1.4, 3.1, 8.4 Договору ТОВ "ДСК СТАНДАРТ" у строки, встановленні Договором до виконання робіт 2 етапу (будівельних робіт по визначеному об`єкту) не приступив, про хід виконання робіт не проінформував, станом на кінцеві терміни виконання будівельних робіт за Договором будівельні роботи по об`єкту не завершив. Відсутність початку будівельних робіт (робіт 2 етапу) по об`єкту, передбачених укладеним договором підтверджена Актом огляду будівельного майданчика від 07.06.2025, складеним уповноваженим представником Замовника та директором ТОВ "ДСК СТАНДАРТ". 
Замовником обгрунтовано було прийнято рішення про розірвання Договору в односторонньому порядку оскільки Підрядник своєчасно будівельні роботи (роботи 2 етапу) за Договором не розпочав в зв`язку з чим закінчення будівельних робіт у визначені Договором строки стало неможливим. 
Договір підряду є розірваним в односторонньому порядку з 03.07.2025.
Позивач правомірно застосував умови Договору щодо притягнення відповідача до відповідальності, визначені розділом 13. 
Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. 
Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. 
Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог.
Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Розмір ставки судового збору із позовних заяв майнового характеру складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; із позовних заяв не майнового характеру складає1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.
Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.
Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
ВИРІШИВ:
Позов задовольнити повністю.
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" (49083, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Пилипа Орлика, буд. 16, оф. 207, ЄДРПОУ 43237430) на користь Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу 113536 грн. 25 коп., пеню за порушення строків завершення будівництва 23902 грн. 37 коп., судовий збір 2422 грн. 40 коп.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повне рішення складено 26.03.2026 

Суддя	 	Г.В. Манько