ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2026	м. Дніпро	Справа № 904/844/26	

за позовом Акціонерного товариства "Укртрансгаз" 
до Товариства з обмеженою відповідальністю "СК МАГНАТ" 
про стягнення 252 321 грн. 95 коп. 
Суддя Манько Г.В.
Представники:
Без виклику учасників справи, їх представників.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "Укртрансгаз" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "СК МАГНАТ" неустойки (пені, штрафу), нараховану відповідно до умов п. 8.3. Договору в загальному розмірі 252 321,95 грн., з яких 184 529,15 грн - пені, 67 792,80 грн - штрафу та судових витрат у справі.
Позивач та відповідач з заявами та клопотаннями до суду не звертались. 
У відповідності до приписів ст. 252 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами оскільки предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін. 
У судовому засіданні на підставі ст.ст. 232, 233 Господарського процесуального кодексу України судом прийнято рішення. 
Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, господарський суд, - 

ВСТАНОВИВ:

Акціонерним товариством "Укртрансгаз" та товариством з обмеженою відповідальністю "СК МАГНАТ" укладено договір підряду №240300000 від 05.03.2024р. (далі Договір).
Підрядник зобов`язується на свій ризик розробити за завданням Замовника на проектування від 21.02.2023 № 23.20.001 (далі - Завдання на проектування) проектну документацію та виконати відповідно до цієї проектної документації будівельні роботи під ключ по об`єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Дашавського ВУ ПЗГ* (Будівельні роботи та поточний ремонт)" код згідно ЄЗС ДК 021:2015 45000000-7, (далі - Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх (п. 1.1 Договору).
Роботи, які Підрядник виконує за цим Договором (далі - Роботи) включають: Проектно-вишукувальні роботи - проектні та вишукувальні роботи стадій "Проект" та "Робоча документація", експертиза проектної документації на стадії "Проект" відповідно до Завдання на проектування (п. 1.2, 1.2.1 Договору).
Роботи, які Підрядник виконує за цим Договором (далі - Роботи) включають: Авторський нагляд за виконанням будівельних робіт ( п. 1.2.3 Договору).
Строк виконання Робіт вказаний у Графіку виконання Робіт, який наведений у Додатку № 4 до цього Договору та є його невід`ємною частиною (п. 1.3 Договору).
Загальна вартість Робіт за цим Договором складає 21 550 123,69 грн (двадцять один мільйон п`ятсот п`ятдесят тисяч сто двадцять три гривні 69 коп.), в тому числі ПДВ 20% З 591 687,28 грн (три мільйони п`ятсот дев`яносто одна тисяча шістсот вісімдесят сім гривень 28 коп.),далі - ціна Договору. Ціна Договору (далі також Договірна ціна) включає вартість повного комплексу Робіт, передбачених для виконання Підрядником та зазначених у п.1.2 цього Договору, і наведена у Додатку № 1 до Договору. Договірна ціна визначена із врахуванням всіх податків, зборів та витрат, передбачених законодавством України, необхідних для виконання Договору. Якщо для виконання Договору необхідно здійснити витрати, обов`язок по сплаті яких прямо не покладений на Замовника, такі витрати покладаються на Підрядника (п. 3.1 Договору).
Підрядник зобов`язується виконати Роботи в межах строку дії Договору, вказаного в п. 12.1, з дотриманням Графіка виконання Робіт (Додаток № 3 до цього Договору). Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін до Графіку виконання Робіт, із врахуванням положень п.13.4 Договору. Підрядник має право на дострокове завершення Робіт (за умови належної їх якості відповідно до умов Договору), не претендуючи при цьому на окрему винагороду (п. 4.1 Договору).
За порушення строків виконання Робіт з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості Робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 10 % вказаної вартості (п. 8.3 Договору).
Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31.03.2025р. в частині гарантійних зобов`язань - до закінчення гарантійного строку, а в частині розрахунків - до їх повного виконання (п. 12.1 Договору).
У випадку невиконання або неналежного виконання підрядником зобов`язань, передбачених цим договором, інших випадках встановлених цим договором та чинним законодавством України, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від договору, письмово повідомивши про це підрядника. При цьому договір буде вважатися розірваним, а зобов`язання такими, що припинилися, на п`ятий робочий день з дати відправлення підряднику такого повідомлення замовником (п. 12.2 Договору).

Сторонами Договору укладено Додаток №1 до договору підряду №2403000007 від 05.03.2024р. - Договірну ціну на проектування та будівництво "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Дашавського ВУ ПЗГ (Будівельні роботи та поточний ремонт)".
Сторонами Договору укладено Додаток №2 до договору підряду №2403000007 від 05.03.2024р. Договірну ціну на будівельні роботи "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Дашавського ВУ ПЗГ (Будівельні роботи та поточний ремонт)".
Сторонами Договору погоджено Графік виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Дашавського ВУ ПЗГ (Будівельні роботи та поточний ремонт)", що є Додатком №3 до договору підряду №2403000007 від 05.03.2024р. 
До матеріалів справи долучено підписаний сторонами Перелік устаткування по об`єкту "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Дашавського ВУ ПЗГ (Будівельні роботи та поточний ремонт)", що є Додатком №4 до договору підряду №2403000007 від 05.03.2024р. 
Акціонерним товариством "Укртрансгаз" та товариством з обмеженою відповідальністю "СК МАГНАТ" підписано без зауважень акт від 13.03.2024р. приймання-передачі Завдання на проектування відповідно до договору підряду №2403000007 від 05.03.2024р. 
Акціонерним товариством "Укртрансгаз" та товариством з обмеженою відповідальністю "СК МАГНАТ" складено акт від 16.09.2025р. здачі-приймання виконаних проектних, науково-проектних, вишукувальних та додаткових робіт за договором підряду №2403000007 від 05.03.2024р.
До матеріалів справи долучено погоджений підрядником Розрахунок вартості проектно-вишукувальних робіт "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Дашавського ВУ ПЗГ (Будівельні роботи та поточний ремонт)" код згідно ЄЗС ДК 021:2015 45000000-7, що є Додатком №1 до Акту №01/25 від 16.09.2025р.

Акціонерне товариство "Укртрансгаз" звернулось до товариства з обмеженою відповідальністю "СК МАГНАТ" з листом від 28.03.2025р. №1001ВИХ-25-1911 в якому зазначило, що станом на 21.03.2025р. підрядник в порушення строків, передбачених умовами договору, не надав, після отримання оригіналу Експертного (позитивний) звіту №49967 від 17.02.2025р., скориговану ПД станцій "Проект" і "Робоча документація" з урахуванням актуальних цін на матеріально-технічні ресурси, довідку з переліком змін та обгрунтуванням щодо зміни вартості будівництва, а також не приступив до виконання будівельних робіт по об`єкту. ТОВ "СК Магнат" не ініційовано внесення змін до Договору, з обгрунтуванням підстав для їх внесення до Договору, відповідно до умов договору, зокрема пунктів 5.2.5 та 13.4. 
АТ "Укртрансгаз" цим листом повідомляє ТОВ "СК Магнат" про односторонню відмову, дострокове розірвання договору підряду №2403000007 від 05.03.2024 по об`єкту будівництва: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Дашацького ВУ ПЗГ (Будівельні роботи та поточний ремонт)".
Акціонернем товариство "Укртрансгаз" звернуло до товариства з обмеженою відповідальністю "СК МАГНАТ" з претензією №1 від 10.12.2025р. якою вимагалась сплата неустойки у сумі 252 321,95 грн.

Під час розгляду справи встановлено, що Згідно з Графіком виконання робіт (Додаток № 3 до Договору), Підрядник був зобов`язаний виконати роботи у наступні строки: проектно вишукувальні Роботи (стадія "Проект") та експертизу проектної документації (далі - Етап 1) - протягом 150 календарних днів з дати початку виконання робіт відповідно до п. 4.5.3 Договору; проектно-вишукувальні Роботи (стадія "Робоча документація") (далі - Етап 2) - протягом 30 календарних днів після завершення робіт стадії "Проект" та експертизи проектної документації (можливе виконання паралельно з Роботами за п. 3 Графіка - будівельні роботи); будівельні роботи (включаючи поставку устаткування) (далі - Етап 3) - протягом 170 календарних днів з дати отримання від Замовника письмового дозволу на початок виконання будівельних робіт. Строк виконання проектно-вишукувальних Робіт за Договором становить 180 календарних днів (з яких 150 календарних днів - строк виконання робіт за Етапом 1, а 30 календарних днів - строк виконання робіт за Етапом 2) з дати початку виконання робіт у розумінні п. 4.5.3 Договору, а строк виконання будівельних Робіт (Етап 3) становить 170календарних з дати отримання від Замовника письмового дозволу на початок виконання будівельних робіт. Загальний термін виконання всіх робіт згідно Договору становить 350 календарних днів, та водночас не може перевищувати строк дії Договору (31.03.2025р.) відповідно до Графіку виконання робіт.
Моментом початку виконання Підрядником проектно-вишукувальних робіт є дата фактичної передачі Замовником Завдання на проектування, підтверджена відповідним Актом.
На виконання умов Договору, Замовник передав Підряднику Завдання на проектування № 23.20.001 від 21.02.2023, що підтверджується Актом приймання-передачі Завдання на проектування від 13.03.2024, підписаний з обох сторін. З огляду на підписання 13.03.2024 Акта приймання-передачі Завдання на проектування, Підрядник був зобов`язаний розпочати виконання проектно-вишукувальних робіт з 14.03.2024р. 
Керуючись умовами Договору та Графіком виконання робіт (Додаток № 3 до Договору), Підрядник зобов`язаний був виконати: Етап 1 - протягом 150 календарних днів з дати початку виконання робіт (14.03.2024), тобто в строк до 10.08.2024 (включно), вартість робіт передбачена Договірною ціною (Додаток № 1 до Договору) - 447 240,00 грн; Етап 2 - протягом 30 календарних днів після завершення робіт по Етапу 1 (з 11.08.2024), тобто в строк до 09.09.2024 (включно), вартість робіт передбачена Договірною ціною (Додаток № 1 до Договору) - 230 688,00 грн; Етап 3 - протягом 170 календарних днів з дати отримання від Замовника письмового дозволу на початок виконання будівельних робіт, вартість робіт передбачена Договірною ціною (Додаток № 1 до Договору) - 20 834 035,69 грн. Виконання проектно-вишукувальних Робіт в повному обсязі по Договору повинно було бути здійснено Підрядником в строк до 10.08.2024р. по Етапу 1 та до 09.09.2024р. по Етапу 2. 
Підрядник, в порушення умов Договору, лише 19.09.2025 листом № 19/09-25 надав Акт №01/25 здачі-приймання виконаних проектних, науково-проєктних, вишукувальних та додаткових робіт від 16.09.2025 по Етапах 1 та 2, який був прийнятий Замовником. Підрядник зобов`язаний був виконати Етап 3 протягом 170 календарних днів з дати отримання від Замовника письмового дозволу на початок виконання будівельних робіт, але не пізніше закінчення строку дії Договору -31.03.2025р. На виконання умов Договору, Замовник 03.02.2025р. надав відповідний дозвіл на початок виконання будівельних робіт (Етап 3) по об`єкту з 04.02.2025. Керуючись умовами Договору та Графіком виконання робіт (Додаток № 3 до Договору), Підрядник зобов`язаний був виконати будівельні Роботи (Етап 3) в строк до 31.03.2025р.
Наявними у справі доказами підтверджено, що ТОВ "СК МАГНАТ" не приступив до виконання робіт у зазначений Договором строк. Листом від 28.01.2025 № 28/01 Підрядник повідомив про намір відтермінувати початок виконання робіт.
Строки виконання робіт у спосіб, визначений п. 13.2 Договору не було змінено.
Керуючись умовам п. 12.2 Договору позивач письмово повідомив відповідача про відмову від Договору в односторонньому порядку. Враховуючи положення п. 12.2. Договору, Договір був розірваним, а зобов`язання за Договором - припиненими на п`ятий робочий день з дати відправлення Підряднику такого повідомлення Замовником.
Наявними у справі доказами підтверджено, що відповідачем роботи, визначені умовами Договору у строк до 04.04.2025р. не було виконано. Позивачем обгрунтовано застосовано умови п. 8.3 Договору, нараховано 184529,15 грн. пені та 67792,80 грн. штрафу.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. 
Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. 
Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Розмір ставки судового збору із позовних заяв майнового характеру складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; із позовних заяв не майнового характеру складає1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.
Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.
Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "СК Магнат" (50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тбіліська, буд. 13, ідентифікаційний код 37065126) на користь акціонерного товариства "Укртрансгаз" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, ідентифікаційний код 30019801) 184529,15 грн. пені, 67792,80 грн. штрафу, судовий збір 3027 грн. 86 коп.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повне рішення складено 16.04.2026

Суддя Г.В. Манько