ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2026	м. Дніпро	Справа № 904/1635/24	

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Манько Г.В. за участю секретаря судового засідання Махортової Д.Р.

за позовом Фізичної особи-підприємця Кіцманюк Юрія Миколайовича 
до Державної установи «Водянська виправна колонія (№ 146)» 
про стягнення 244 761 грн. 

Представники:
від позивача: Гудима Т.В., Кіцманюк Ю.В.
від відповідача: Горлов О.В.

СУТЬ СПОРУ:
Фізична особа-підприємець Кіцманюк Юрій Миколайович звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Державної установи «Водянська виправна колонія (№ 146)» грошових коштів 244 761 грн. та судових витрат у справі.
Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. Надав пояснення у справі щодо виконання вимог експерта. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві. 
Відповідач проти позову заперечував, просив суд у позові відмовити. Надав додаткові пояснення у справі. Просив суд визнати неналежними доказами акти закриття прихованих робіт, акт на додаткові роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт. Надав відзив на позов у якому просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог. 
У справі було призначено проведення судової експертизи та отримано висновок експерта. 
У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення. 
Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, господарський суд, - 
ВСТАНОВИВ:
Державною установою "Водянська виправна колонія (№146)" та фізичною особою-підприємцем Кіцманюк Юрієм Миколайовичем укладено Договір підряду від 01.11.2023 року № Г- 107 (далі Договір).
Замовник доручає, а підрядник в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки, власними силами, виконати роботи за предметом: "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку №1, саме відділення соціально-психологічної служби №2 державної установи "Водянська виправна колонія (№146)" за адресою вул. Молодіжна, 33, с. Водяне, Криворізький район, Дніпропетровська область", за кодом ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація", далі Роботи) (далі Договір).
Ціна Договору визначена на підставі протоколу погодження договірної ціни (Додаток 1), який є невід`ємною частиною даного Договору ( п. 2.1 Договору)
Договірна ціна є динамічною і складає 3100000 грн. без ПДВ, без урахування витрат на утримання служби замовника (п. 2.2 Договору).
Розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до Бюджетного кодексу України в межах та за рахунок коштів Замовника: розрахунки за виконані роботи здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування замовником протягом 30 календарних днів на банківський поточний рахунок підрядника коштів у національній валюті України, на підставі підписаних сторонами актів виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, або інших відповідних документів, передбачених чинним законодавством відповідно до вимог наказу Мінрегіону від 01.11.2021 №281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" та Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" в межах ціни цього договору. Згідно зі статтею 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання замовником бюжетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Договірні зобов`язання виникають в межах асигнувань, затверджених у встановленому порядку для замовника (п. 3.1 Договору).
Терміни виконання робіт за цим договором, а також їх окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів), визначаються календарним графіком виконання робіт (далі - "Графік"), який оформлюється у вигляді додатку і є невід`ємною частиною цього Договору (п. 4.1 Договору).
Термін виконання робіт за цим договором починає обчислюватися з моменту фактичного прийняття об`єкта робіт відповідно до умов Договору. У разі несвоєчасного прийняття об`єкту термін початку виконання робіт починає обчислюватися останнього дня строку приймання об`єкту, визначеного цим Договором (п. 4.1 Договору).
Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток №2) до 15.04.2024р. (початок робіт узгоджується із замовником, строк виконання робіт до 15.04.2024р.) (п. 4.2 Договору).
Місце виконання робіт: "Водянська виправна колонія (№146)" за адресою: вул. Молодіжна 33, с. Водяне, Криворізький район, Дніпропетровська область (п. 4.3 Договору).
Замовник має право достроково розірвати цей договір у випадках, передбачених цим договором (п. 5.2, 5.2.9 Договору).
Підрядник виконує роботи відповідно вимог затвердженої проектно-кошторисної документації, національних стандартів України, державних норм і правил, календарного графіку виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці, письмових вказівок замовника (п. 6.2 Договору).
Здача-приймання робіт після їх закінчення оформлюється актом приймання виконаних робіт та декларацію про прийняття об`єкту в експлуатацію (п. 8.1 Договору).
У разі виникнення між замовником та підрядником спору щодо недоліків виконаних робіт або їх причин, на вимогу будь-якою з сторін повинна бути призначена експертиза. Експертна організація та умови проведення експертизи визначаються замовником. Витрати на проведення експертизи несе підрядник. У випадку, якщо експертизою встановлено відсутність порушень договору або причинного зв`язку між діями підрядника та виявленими недоліками, на яких наполягав замовник понесені підрядником витрати на проведення експертизи компенсуються замовником (п.8.6 Договору).
Замовник має право в односторонньому порядку розірвати або призупинити договір у випадках виявлення недоцільності фінансування та подальшого ведення виконуваних робіт, а також появи обставин непереборної сили тощо (п. 14.1 Договору) .

Державна установа "Водянська виправна колонія (№146)" звернулась до фізичної особи-підприємця Кіцманюк Юрія Миколайовича з листом від 19.12.2023р. №146/6-1644 щодо призупинення роботи.
Державна установа "Водянська виправна колонія (№146)" звернулась до фізичної особи-підприємця Кіцманюк Юрія Миколайовича з листом від 21.12.2023р. №146/10-1674 при призупинення виконання договору підряду.
Фізична особа-підприємець Кіцманюк Юрій Миколайович звернувся до державної установи "Водянська виправна колонія (№146)" з претензією №1 від 10.01.2023р.
Державна установа "Водянська виправна колонія (№146)" звернулась до фізичної особи-підприємця Кіцманюк Юрія Миколайовича з листом від 17.01.2024р. №146/10-139 про розірвання договору підряду в односторонньому порядку. За текстом Державна установа «Водянська виправна колонія (№146») повідомляє позивача, що 17.01.2024 року Договір підряду від 01.11.2023 року № 107 «Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку № 1, саме відділення соціально-психологічної служби № 2 державної установи «Водянська виправна колонія (№ 146)» за адресою: вул. Молодіжна, 33, с. Водяне, Криворізький район, Дніпропетровська область» (далі - Договір підряду) розірвано в односторонньому порядку на підставі ч. 4 ст. 849 ЦК та п. 14.1 Договору підряду.
Господарський суд погоджується з доводами позивача та відповідача, що за умовами п. 14.1 Договору він є розірваним. 
Державна установа "Водянська виправна колонія (№146)" звернулась до фізичної особи-підприємця Кіцманюк Юрія Миколайовича листом від 13.02.2024р. №146/10-467 про розгляд наданої документації по виконаним роботам згідно договору підряду №107 від 01.11.2023р.
Фізична особа-підприємець Кіцманюк Юрій Миколайович звернувся до державної установи "Водянська виправна колонія (№146)" з відповіддю на лист №146/10-467 від 13.02.2024р. про зауваження розгляду наданої документації по виконаним роботам зазначені в описі та зареєстровані в установі за вх. №312 від 08.02.2024р. згідно договору підряду №Г-107 від 01.11.2023р.
Державна установа "Водянська виправна колонія (№146)" надала фізичній особі-підприємцю Кіцманюк Юрія Миколайовича відповідь від 20.03.2024р. №146/3-806 про розгляд листа вих.№2 від 12.03.2024р.
Фізична особа-підприємець Кіцманюк Юрій Миколайович звернувся до державної установи "Водянська виправна колонія (№146)" з вимогою (претензією) №2 від 21.03.2024р. щодо виплати за виконану частину роботи та відшкодування збитків у сумі 244761 грн.
Державна установа "Водянська виправна колонія (№146)" звернулась до фізичної особи-підприємця Кіцманюк Юрія Миколайовича з відповіддю №146/2-871 від 29.03.2024р. на вимогу (претензію) щодо виплати плати за виконану частину роботи та відшкодувіання збитків вих. №2 від фізичної особи - підприємця Кіцманюка Ю.М. Пропонувала позивачу здійснити перерахунок вартості виконаних будівельних робіт.

Господарським судом отримано висновок експерта №1829-24 за результатами судової будівельно-технічної експертизи по справі №904/1635/24 від 24.02.2026р. За текстом висновку експертом підтверджується обсяг фактично виконаних будівельних робіт по Договору підряду від 01.11.2023 року № Г- 107 ""Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку №1, а саме відділення соціально- психологічної служби № 2 державної установи "Водянська виправна колонія (№146)" за адресою: вул. Молодіжна, 33, с. Водяне, Криворізький район, Дніпропетровська область" за кодом ДК 021:2015 - 5453000-7 Капітальний ремонт і реставрація", визначені наступними документами: Актом приймання викопаних будівельних робіт №1 за грудень 2023 року та Актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2023 року.
Вартість фактично виконаних будівельних робіт по Договору підряду від 01.11.2023 року № Г- 107 ""Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку №1, а саме відділення соціально- психологічної служби № 2 державної установи "Водянська виправна колонія (№146)" за адресою: вул. Молодіжна, 33, с. Водяне, Криворізький район, Дніпропетровська область" за кодом ДК 021:2015 - 5453000-7 Капітальний ремонт і реставрація", становить 232 592,00 грн., в тому числі податки, збори, обов`язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) 5%-11 630,00 гривень.
Експертом зазначено, що враховуючи, що при візуальному огляді експертом встановлена відсутність ознак шліфування поверхні стін та стелі які були шпакльовані мінеральною шпаклівкою, невідповідність вартості фактично виконаних будівельних робіт вартості будівельних робіт зазначених в актах виконаних робіт на об`єкті: "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку №1, а саме відділення соціально-психологічної служби № 2 державної установи "Водянська виправна колонія (№146)" за адресою: вул. Молодіжна, 33, с. Водяне, Криворізький район, Дніпропетровська область", становить 12 169,00 грн. з урахуванням загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат та єдиного податку 5%.

Адвокатом Скок Антоном Володимировичем та фізичною особою - підприємцем Кіцманюк Юрієм Миколайовичем підписано договір №08-03/24 про надання правової допомоги від 08.03.2024р. Предметом Договору є надання правничої допомоги щодо стягнення заборгованості за Договором підряду. 
Адвокатом Скок Антоном Володимировичем та фізичною особою - підприємцем Кіцманюк Юрієм Миколайовичем підписано акт №1 від 05.04.2024р. виконаних робіт. Розмір гонорару - 26500 грн.
Згідно платіжної інструкції №39 від 12.03.2024р. фізичною особою - підприємцем Кіцманюк Юрієм Миколайовичем перераховано Скок А.В. ФОП 15 900 грн. передплати по договору про надання правової допомоги №08-03/24 від 08.03.2024р., рахунок №1 від 11.03.2024 р. без ПДВ.
Позивачем долучено до матеріалів справи додаткову угоду №1 від 26.12.2024р. про продовження строку дії Договору про надання правової допомоги №08-03/24 від 08.03.2024р. За текстом сторони домовилися про продовження строку дії Договору про надання правової
допомоги №08-03/24 від 08.03.2024 року до 31 грудня 2026 року. 
Згідно квитанції про прийняття до виконання платіжної інструкції №5 від 23.01.2026р. фізичною особою - підприємцем Кіцманюк Юрієм Миколайовичем перераховано Скок А.В. ФОП 10 600 грн. оплати гонорару адвоката по акту №1 від 05.04.2024р. 

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. 
Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. 

Наданими учасниками справи доказами, Висновком експерта від 24.02.2026р. підтверджено виконання позивачем робіт, передбачених умовами п. 1.1 Договору, вартістю 232592 грн., що є підставою для задоволення позовних вимог у вказаній частині. 

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Розмір ставки судового збору із позовних заяв майнового характеру складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; із позовних заяв не майнового характеру складає1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.
Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.
Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
ВИРІШИВ:
Позов задовольнити частково.
Стягнути з Державної установи "Водянська виправна колонія (№146)" (53734, Дніпропетровська область, Криворізький район, вул. Молодіжна, буд. 33, ідентифікаційний код 14316876) на користь фізичної особи - підприємця Кіцманюк Юрія Миколайовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) заборгованість 232592 грн., судовий збір в сумі 3487 грн. 84 коп., витрати на правничу допомогу 25 175 грн., витрати по оплаті судової експертизи 44 316 грн. 36 коп.
В решті суми позову відмовити.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повне рішення складено 20.05.2026 

Суддя	 	Г.В. Манько