Справа № 754/14307/25
Провадження № 2/734/317/26

Р І Ш Е Н Н Я
іменем України
01 травня 2026 року	  	селище Козелець	

Козелецький районний суд Чернігівської області в складі: 
Головуючого судді Соловей В.В.,
секретар судових засідань Пахмутова О.Є., 
із участю представника позивача – адвоката Ткачука В.П. і представника відповідача – адвоката Думчевої І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Чернігівобленерго» про захист прав споживача та стягнення коштів за несвоєчасне підключення до електромереж,
у с т а н о в и в:
із позовною заявою про захист прав споживача та стягнення коштів за несвоєчасне підключення до електромереж у Деснянський районний суд м. Києва звернулася представник позивача – адвокат Хомляк Ольга Русланівна в інтересах позивача ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Чернігівобленерго». Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 09 лютого 2024 року між ОСОБА_1 і Акціонерним товариством «Чернігівобленерго» укладено Договір виконання робіт № 300306174, щодо приєднання позивача до електромереж. У зв`язку зі значним простроченням виконання робіт щодо підключення до електромереж, позивачем направлено претензію про повернення коштів за Договором виконання робіт № 300306174 від 09 лютого 2024 року, якою просив відповідача перерахувати грошові кошти в розмірі 211985.04 гривень протягом десяти банківських днів із моменту отримання претензії. Відповідне право позивача на повернення 100 відсотків плати за приєднання у випадку прострочення приєднання до електромереж більше ніж 120 календарних днів передбачене абз. 12 п. 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу систем розподілу (затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 310). Відповідачем надана відповідь на претензію, що підстав для виплати грошових коштів немає. 
Відповідно до п. 1.1 Договору у порядку та на умовах, визначених Договором, виконавець бере на себе зобов`язання за рахунок замовника виконати наступні будівельно–монтажні роботи - «Зовнішнє електропостачання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер № 7422082700:01:004:0332 ( ОСОБА_1 № 5707), а замовник зобов`язується сплатити виконавцеві вартість виконаних робіт і прийняти їх результати. Відповідно до п. 2.6 Договору виконавець розпочинає виконувати роботи за умови здійснення попередньої оплати вартості (у разі, якщо така передбачена умовами Договору), та/або отримання листа від замовника щодо погодженої дати початку виконання. З цього моменту настає відлік строків виконання робіт. Відповідно до п. 6.1 Договору вартість робіт складає 211985.04 гривень. Згідно з п. 7.1 Договору оплата робіт проводиться на умовах попередньої оплати у розмірі 100% вартості робіт, визначеної у п. 6.1 Договору, на поточний рахунок виконавця протягом двадцяти банківських днів із моменту отримання рахунку замовником.
Оплата за Договором здійснена замовником у повному обсязі, що підтверджується відповідними платіжними документами, - квитанцією №3СЛ5-ХХНК-4ПМЕ-РВ4Т від 29 лютого 2024 року на загальну суму 211985.04 гривень. 30 липня 2025 року позивач отримав відповідь за № 26/6834/01-14 від 30 липня 2025 року, в якій відповідач заявляє про те, що не вбачає у своїх діях порушень. 
Згідно з п. 2.6 Договору відлік строку виконання робіт починається з моменту здійснення замовником попередньої оплати та погодження дати початку робіт. Відповідно до ч. 2 п. 4.8.5 розділу IV Кодексу систем розподілу встановлюється, що факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання. Таким чином, якщо підключений лише кабель/обладнання, але напруга ще не подана, споживач ще не вважається підключеним стосовно користування електроенергією. Це лише факт виконання будівельно-монтажних робіт. Відтак, позивачем і відповідачем укладений договір про виконання робіт № 300306174 від 09лютого 2024 року, що не відповідає типовому договору приєднання до електричних мереж, передбачений додатком № 2 Типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж систему розподілу до Кодексу систем розподілу, а тому відповідні права та обов`язки мають регулюватися відповідним Типовим договором. 
Позивач вважає, що: відповідачем не дотримано визначених Договором строків виконання робіт; послуга з приєднання надана з порушенням вимог Кодексу систем розподілу; сплачена сума у розмірі 211985.04 гривень підлягає поверненню позивачу. Позивачем ОСОБА_1 заявлені позовні вимоги про стягнення з відповідача Акціонерного товариства «Чернігівобленерго» на його користь заборгованості за Договором у розмірі 211985.04 гривень.
За ухвалою судді Деснянського районного суду м. Києва від 01 вересня 2025 року, що набрала законної сили, цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Чернігівобленерго» про захист прав споживача та стягнення коштів за несвоєчасне підключення до електромереж передана на розгляд за підсудністю до Козелецького районного суду Чернігівської області. За ухвалою від 08 грудня 2025 року судді Козелецького районного суду Чернігівської області відкрите провадження у цивільній справі і прийнята вказана позовна заява до розгляду та призначене підготовче судове засідання. 30 грудня 2025 року представником відповідача Думчевою І.В. поданий відзив на позовну заяву. 06 січня 2026 представником позивача – адвокатом Кисель А.С. подана відповідь на відзив на позовну заяву. За ухвалою Козелецького районного суду Чернігівської області від 11 лютого 2026 року закрите підготовче провадження у цивільній справі та призначена справа до судового розгляду по суті.
Позивач ОСОБА_1 і його представник – адвокат Ткачук В.П. позовні вимоги підтримали. Представник відповідача – адвокат Думчева І.В. позовні вимоги не визнала. 
У судовому засіданні встановлено, що 18 вересня 2023 року (вх. № 59-180923-2) до АТ «Чернігівобленерго» від ОСОБА_1 надійшла заява про тимчасове приєднання за місцем розташування об`єкта замовника ( АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер 7422082700:01:004:0332). 26 вересня 2023 року між ОСОБА_1 і АТ «Чернігівобленерго» укладений Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу АТ «Чернігівобленерго» № 5707/2, де відповідно до розділу 1 Договору тимчасова точка приєднання є альтернативна точка приєднання: в місцях контактних з`єднань лінії живлення 0.4 кВ об`єкту замовника з електричним обладнанням РУ-0.4 кВ КТП-363-7, тобто будівельно-монтажні роботи виконуються у мережах замовника. Тип приєднання згідно з вимогами Кодекс систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, - стандартне. Сторона, відповідальна за будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) електричних мереж від тимчасової точки приєднання/альтернативної точки приєднання до місця розташування об`єкта замовника, - замовник. Згідно з п. 3.2.4 Договору замовник зобов`язаний письмово повідомити Оператора системи розподілу про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії. Відповідно до п. 4.1 Договору надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок об`єкта замовника до електричних мереж Оператора системи розподілу здійснюється без стягнення плати. Відповідно до п. 7.1 Договору цей Договір набирає чинності від дати його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов`язань, але не довше ніж до 31 грудня 2024 року. 
11 жовтня 2023 року (вх. № 1225/1397/12-08) від ОСОБА_1 до Сервісного центру обслуговування клієнтів АТ «Чернігівобленерго» надійшла заява на розробку проектної документації та виконання будівельно-монтажних робіт за адресою - АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер 7422082700:01:004:0332.
Відповідно до протоколу погодження договірної ціни між ОСОБА_1 і АТ «Чернігівобленерго» досягнуто згоди про розмір договірної ціни за виконання робіт згідно Робочого проєкту «Зовнішнє електропостачання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер № 7422082700:01:004:0332 ( ОСОБА_1 № 5707)», що склала 211985.04 гривень, в тому числі ПДВ 20% - 35380.84 гривень.
Після розроблення проектно-кошторисної документації, 09 лютого 2024 року між ОСОБА_1 і Акціонерним товариством «Чернігівобленерго» укладено Договір виконання робіт № 300306174. Відповідно до умов указаного договору виконавець - АТ «Чернігівобленерго» взяло на себе зобов`язання за рахунок замовника - ОСОБА_1 виконати наступні будівельно–монтажні роботи - «Зовнішнє електропостачання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер № 7422082700:01:004:0332 ( ОСОБА_1 № 5707)», а замовник зобов`язується сплатити виконавцеві вартість виконаних робіт і прийняти їх результати (п. 1.1 Договору). Згідно з п. 2.6 Договору виконавець розпочинає виконувати роботи за умови здійснення попередньої оплати вартості (у разі, якщо така передбачена умовами Договору), та/або отримання листа від замовника щодо погодженої дати початку виконання. З цього моменту настає відлік строків виконання робіт. Відповідно до п. 5.1 Договору виконавець зобов`язався виконати зазначені даним договором роботи протягом 180 робочих днів із початку відліку строку виконання робіт, визначеного п. 2.6 цього договору. Виконавець не позбавлений можливості виконати роботи достроково. Відповідно до п. 6.1 Договору вартість робіт складає 211985.04 гривень. Згідно з п. 7.1 Договору оплата робіт проводиться на умовах попередньої оплати у розмірі 100% вартості робіт, визначеної у п. 6.1 Договору, на поточний рахунок виконавця протягом двадцяти банківських днів із моменту отримання рахунку замовником.
Оплата за вказаним Договором проведена позивачем ОСОБА_1 , як замовником, у повному обсязі, що підтверджується платіжним документом, - квитанцією №3СЛ5-ХХНК-4ПМЕ-РВ4Т від 29 лютого 2024 року на загальну суму 211985.04 гривень. 30 липня 2025 року позивач ОСОБА_1 отримав відповідь за № 26/6834/01-14 від 30 липня 2025 року, в якій відповідач АТ «Чернігівобленерго» зазначив про те, що не вбачає у своїх діях порушень. Згідно з п. 2.6 Договору відлік строку виконання робіт починається з моменту здійснення замовником попередньої оплати та погодження дати початку робіт.
28 квітня 2025 року ОСОБА_1 звернувся до Чернігівського РЕМ із заявою про укладення тимчасового договору споживача про надання послуг із розподілу електричної енергії та повідомив, що будівельно-монтажні роботи із зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності до точки приєднання) виконані в повному обсязі 11 вересня 2024 року, влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії виконане 11 вересня 2024 року. 
Згідно з п. 3.1.3 Договору про тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу АТ «Чернігівобленерго» № 5707/02 від 26 вересня 2023 року, після отримання від замовника повідомлення про виконання технічних умов та влаштування комерційного обліку електричної енергії оформити із замовником акт надання послуги з тимчасового приєднання. Відповідно до Акту № 5707 від 30 квітня 2025 року надання послуги з тимчасового приєднання за договором про тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу № 5707/2 від 26 вересня 2023 року АТ «Чернігівобленерго» (Оператор системи розподілу) надав, а ОСОБА_1 (замовник) прийняв послугу з тимчасового приєднання електроустановок «Житловий будинок» за адресою – АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер 7422082700:01:004:0332», й мережі Оператора системи розподілу готові до підключення електроустановок об`єкта замовника. Послуга з тимчасового приєднання електроустановко замовника до електричних мереж надається Оператором системи розподілу без стягнення плати. 
Позивачем ОСОБА_1 направлена 03 липня 2025 року до АТ «Чернігівобленерго» претензія про повернення коштів за Договором виконання робіт № 300306174 від 09 лютого 2024 року. У листі від 30 липня 2025 року за № 26/6834/01-14 АТ «Чернігівобленерго», адресованого позивачу ОСОБА_1 , зазначено, що строк виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Зовнішнє електропостачання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер № 7422082700:01:004:0332 ( ОСОБА_1 № 5707)» становив 83 робочі дні, що не порушує умов Договору виконання робіт № 300306174 від 09 лютого 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Згідно з ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. 
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковим відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України).
Згідно зі ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ст.ст. 525 і 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно зі ст.ст. 530, 610 і 629 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Договір є обов`язковим до виконання сторонами.
Відповідно до ч. 1 ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. 
Згідно з ч. 1 ст. 905 ЦК України строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. 
Вислухавши пояснення позивача ОСОБА_1 , позиції представника позивача – адвоката Ткачука В.П. і представника відповідача – адвоката Думчевої І.А., дослідивши надані сторонами докази, суд вважає, що позов ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Чернігівобленерго» про захист прав споживача та стягнення коштів за несвоєчасне підключення до електромереж не підлягає задоволенню. 
Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до п. 4.2.6 Кодексу систем розподілу у випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж із порушенням вимог, встановлених п. 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право: звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 7 до цього Кодексу (далі - заява про відшкодування); у разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов`язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів); у випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав. 
За постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» зупинено на період дії в Україні воєнного стану до прийняття НКРЕКП окремого рішення дію розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, і Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965. 
Відповідно до п. 6 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану», послуга з тимчасового приєднання надається оператором системи розподілу на підставі договору про тимчасове приєднання, що укладається між замовником послуги з тимчасового приєднання та оператором системи розподілу. 
Позивачем ОСОБА_1 не надані належні і допустимі докази для підтвердження заявлених позовних вимог до АТ «Чернігівобленерго». 
25 червня 2024 року АТ «Чернігівобленерго» виконані будівельно-монтажні роботи, що підтверджується Актом № 2500040324 від 28 червня 2024 року приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором виконання робіт № 3000306174 від 09 лютого 2024 року, що позивачем ОСОБА_1 отриманий 16 серпня 2024 року, але не підписаний і не повернутий акт приймання передачі виконаних робіт до АТ «Чернігівобленерго» (для виконання вимог п.п. 4.1-4.3 Договору). 
Відповідачем АТ «Чернігівобленерго», із урахуванням умов Договору про тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу АТ «Чернігівобленерго» № 5707/2, що укладений 26 вересня 2023 року між АТ «Чернігівобленерго» і ОСОБА_1 , дотримані визначені Договором виконання робіт № 300306174, що укладений 09 лютого 2024 року між АТ «Чернігівобленерго» і ОСОБА_1 , строки виконання (впродовж 180 робочих днів із початку відліку строку виконання робіт, визначеного у п. 2.6 цього Договору (виконавець розпочинає виконувати роботи за умови здійснення попередньої оплати вартості (у разі, якщо така передбачена умовами Договору), та/або отримання листа від замовника щодо погодженої дати початку виконання. З цього моменту настає відлік строків виконання робіт) будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Зовнішнє електропостачання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер № 7422082700:01:004:0332 ( ОСОБА_1 № 5707)».
Керуючись ст.ст. 15, 16, 509, 525, 526, 530, 610, 626, 629, 901 і 905 ЦК України, ст.ст. 76, 81, 258, 259, 263-265, 268, 293, 352, 354 і 355 ЦПК України, суд
у х в а л и в:
позов ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Чернігівобленерго» про захист прав споживача та стягнення коштів за несвоєчасне підключення до електромереж залишити без задоволення. 
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Учасники справи мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду повністю або частково. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів із дня проголошення до Чернігівського апеляційного суду через Козелецький районний суд Чернігівської області.

Суддя