ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua	
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.05.2026	Справа № 910/682/26	

Суддя Погрібна С.В., після виходу з лікарняного та відпустки, розглянувши матеріали за позовом Міністерства оборони України (адреса: 03168, м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6; код ЄДРПОУ: 00034022) 
до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС» (адреса: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 72; код ЄДРПОУ: 31065419)
про стягнення коштів
без виклику сторін,
УСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Міністерства оборони України (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС» (далі - відповідач / ТОВ «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС») про стягнення 104 876,10 грн пені та 48 942,18 грн штрафу за Договором № 220/71/33 на виконання робіт з виготовлення проєктної документації від 11.08.2025. 
В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив про неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за вказаним Договором в частині строків виконання робіт, у зв`язку з чим відповідач повинен сплатити на користь позивача штрафні санкції за порушення умов зазначеного Договору.
Ухвалою суду від 02.02.2026 прийнято позовну заяву до розгляду і відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання) та, між іншого, встановлено відповідачу строк для подання суду відзиву - 15 днів з дня вручення даної ухвали.
Ухвалою суду від 26.02.2026 заяву Статкевич Вікторії Вікторівни про вступ у справу як представника відповідача, повернуто без розгляду.
Будь-які звернення, клопотання чи відзив від відповідача до суду не надходили.
Ухвала суду про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі доставлена відповідачу в його електронний кабінет 02.02.2026, що підтверджується відповідною довідкою.
Враховуючи викладене, відповідач повідомлений належним чином про розгляд даної справи.
Приписами частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.
Приймаючи до уваги зазначене, справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України.
У частині 8 статті 252 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.
Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.
Під час розгляду справи по суті судом були досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи та встановлено обставини.
Рішення виноситься суддею з урахуванням строку її перебування на лікарняному та у відпустці.
Окрім того, у зв`язку зі збройною агресією збоку РФ, на підставі чого введено в Україні воєнний стан, враховуючи поточну обстановку, постійні тривоги, які впливають на працездатність, суд був вимушений вийти за межі строку винесення рішення, встановленого ГПК України.
Дослідивши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору, суд встановив наступне.
11.08.2025 між Міністерством оборони України (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС» (далі - Виконавець) укладено Договір на виконання робіт з виготовлення проєктної документації № 220/71/33 (далі - Договір № 220/71/33 від 11.08.2025).
Відповідно до п.п. 1.1. - 1.4. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання перед Замовником виконати роботи з виготовлення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ, військове містечко № 54» Код ДК - 71320000-7 (далі - Роботи), у тому числі проходження експертизи проектної документації з отриманням позитивного експертного звіту, на основі Завдання на проектування (Додаток 5) до Договору, що надається Замовником Виконавцю. 
Технічні та інші вимоги до проектної документації, що є предметом Договору, регламентуються нормативними документами, Завданням на проектування (Додаток 5). 
Зміст і виконання окремих робіт та етапів визначаються Завданням на проектування (Додаток 5) та Календарним планом виконання робіт (Додаток 3), що є невід`ємною складовою частиною Договору. Проектна документація розробляється в одну стадію: - «Робочий проект» (РП) згідно з ДБН. 
Замовник доручає Виконавцю укласти договір з експертною організацією на проходження експертизи проектної документації та передати проектну документацію на експертизу. Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається Замовником. Вартість експертизи визначається експертною організацією. Уточнення суми відшкодування проходження експертизи проектної документації оформлюється додатковою угодою з Замовником після підписання договору з експертною організацією. Виконавець здійснює технічний супровід експертизи та безоплатне усунення в розробленій ним документації недоліків до отримання позитивного експертного звіту.
Проектну документацію стадії «Робочий проект», Виконавець в повному об`ємі згідно з Календарним планом виконання робіт (Додаток 3) передає Замовнику після отримання позитивного експертного звіту. Вартість експертизи може бути уточнена за відповідними первинними документами експертної організації тільки в сторону зменшення. Відповідно може буде уточнена та відкоригована вартість етапу. 
Відповідно до п. 1.6. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 проектування виконується за одним етапом: виконання вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні вишукування); виготовлення проектної документації стадії «РП»; проходження та технічний супровід експертизи проектної документації стадії РП з отриманням позитивного експертного звіту; передача Замовнику остаточних проектних рішень (після проходження експертизи), відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 3), що є невід`ємною частиною Договору.
Відповідно до п. 2.1. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 договірна ціна Робіт є тверда і зазначена у Договірній ціні (Додаток 1) на підставі розробленого Виконавцем Зведеного кошторису на виконання робіт з виготовлення проектної документації та кошторисів до нього на виконання робіт (Додаток 2) та становить 699 174,00 грн, зокрема ПДВ 20% 116 529,00 грн. 
Вартість робіт за Договором визначається у відповідності до наказу Міністерства розвитку громадян та територій України від 01.11.2021 № 281 (Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво) та є складовою частиною загальної вартості Робіт по об`єкту і входить до зведеного кошторисного розрахунку.
Відповідно до п.п. 2.3. - 2.4. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 фінансування робіт проводиться за Планом фінансування робіт, який є невід`ємною частиною Договору (Додаток 4). План фінансування робіт складається з урахуванням Календарного плану виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи. 
Сторони погоджують План фінансування робіт у порядку, визначеному у Договорі. 
План фінансування робіт складається на весь період виконання робіт. Відповідно до Договору Замовник має право у визначені строки уточнити План фінансування робіт на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо.
Відповідно до п.п. 3.1. - 3.4. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 за підсумками виконання робіт Виконавець направляє Замовнику підписані зі свого боку три примірники Акту. 
В Акті Виконавець вказує перелік виконаних робіт, а також їх вартість і суму до сплати. До Акту додаються результати робіт (шляхом підписання накладної обома Сторонами).
Замовник приймає виконані Виконавцем Роботи та підписує оформлені у встановленому порядку Акти. 
Відповідно до п.п. 4.1. - 4.5. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 строк виконання робіт у цілому за Договором та кожного етапу визначається; в Календарному плані виконання робіт (Додаток 3) та становить 90 календарних днів з дати підписання Договору та надання вихідних даних. 
Виконавець зобов`язаний розпочати виконання робіт з дня підписання Договору Сторонами та отримання від Замовника Технічного завдання, Завдання на проектування та інших вихідних даних. 
У разі затримки забезпечення Виконавця вихідними даними початок виконання робіт може бути подовжений на строк затримки. 
Перегляд строків виконання робіт може здійснюватися за умови підписання Сторонами додаткової угоди (з обґрунтуванням обставин, що їх спричинили).
У разі внесення змін до проектної документації передбачених у п. 5.1.2. Договору строк Виконання робіт може бути подовжений в залежності від уточнень чи обсягів коригування.
Відповідно до пп. 5.3.1., 5.3.3., 5.3.7. п. 5.3. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 виконавець зобов`язаний, зокрема, якісно виконати роботи у терміни, установлені Календарним планом виконання робіт; інформувати Замовника про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від термінів, зазначених у Календарному плані виконання робіт (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо) та повідомити Замовника про необхідність внесення змін шляхом направлення письмового обґрунтування, яке повинно включати: опис запропонованих змін; причини та підстави для внесення змін; потенційний вплив змін на строки виконання робіт, вартість проекту та інші, аспекти Договору.
Відповідно до п.п. 6.1., пп. 6.3.4. п. 6.3. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 у разі невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором. 
Виконавець несе відповідальність, зокрема, за строки виконання проектної документації; 
Відповідно до п.п. 6.4. - 6.5. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 за порушення строків виконання будь-якого окремого виду робіт за Договором та строків закінчення виконання робіт, зазначених у Календарному плані виконання робіт, Виконавець сплачує Замовникові пеню у розмірі 0,1% від Договірної ціни, за кожен день такого прострочення. 
За порушення строків виконання зобов`язань понад тридцять календарних днів- -додатково штраф у розмірі 7% ціни Договору. 
Сторони погодились, що розмір збитків та неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків, не може бути більше суми заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за весь час прострочення. Відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України, частини шостої статті 231 Господарського кодексу України та статті 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» Сторони встановили інший розмір процентів - 0,0001%. 
Відповідно до п.п. 10.1., 12.3., 12.4. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами, засвідчення підпису Замовника гербовою печаткою Замовника та діє до 31.12.2025, а в частині проведення розрахунків до повного виконання.
Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору. Питання щодо внесення змін до Договору може вирішуватися Сторонами не пізніше ніж за 5 діб до закінчення його строку. 
Додаткові угоди до Договору укладаються у письмовій формі та підписуються Сторонами або уповноваженими представниками і є ного невід`ємною частиною Договору
Також між сторонами підписані Додатки до Договору № 220/71/33 від 11.08.2025. зокрема: Додаток 1 - Договірна ціна на виконання робіт з виготовлення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ, військове містечко № 54» (Стадія «РП»- «Робочий проект»); Додаток 2 - Зведений кошторис на виконання робіт з виготовлення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ, військове містечко № 54» (Стадія «РП»- «Робочий проект»); Додаток 3 - Календарний план виконання робіт з виготовлення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання Національного військово медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ, військове містечко № 54» (Стадія «РП - «Робочий проект»; Додаток 4 - План фінансування робіт з виготовлення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання Національного військово- медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ, військове містечко № 54» (Стадія «РП» - «Робочий проект»); Додаток 5 - Завдання на проектування.
Відповідно до Додатку 1 до Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 Договірна ціна на виконання робіт з виготовлення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ, військове містечко № 54» (Стадія "РП"- «Робочий проект») становить 699 174,00 грн.
Відповідно до Додатку 3 до Договору № 220/71/33 від 11.08.2025, сторони погодили, що роботи з інженерно - геодезичного вишукування повинні розпочатися з дати підписання Договору та надання вихідних даних та закінчитися через 15 календарних днів. Також сторони погодили, що роботи з проходження та технічного супровіду експертизи проєктної документації стадії «РП» та виготовлення проєктної документації стаді «РП» повинно розпочатися з дати підписання Договору та надання вихідних даних та закінчитися протягом 90 календарних днів.
27.10.2025 Міністерство оборони України направило ТОВ «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС» лист, в якому висловило прохання повідомити про причини відхилення від Календарного плану виконання робіт за Договором № 220/71/33 від 11.08.2025, оскільки станом на 23.10.2025 роботи за Договором не виконані, хоча виконання робіт в частині «Інженерно - геодезичних вишукувань» встановлено до 26.08.2025 включно.
27.11.2025 Міністерство оборони України направило ТОВ «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС» претензію № 1 щодо сплати пені та штрафу за порушення зобов`язань за Договором у сумі 113 965,36 грн.
08.01.2026 ТОВ «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС» листом № 6 повідомило Міністерство оборони України, що зобов`язуються виконати усі зобов`язання з виконання послуг/робіт за Договором № 220/71/33 від 11.08.2025. 
Матеріали справи не містять відомостей щодо сплати відповідачем штрафних санкцій в позасудовому порядку. Жодних заперечень з приводу позовних вимог відповідачем не висловлено.
Відповідно до розрахунку пені та штрафу за порушення строків виконання проєктних робіт за Договором позивачем нараховано за період з 26.08.2025 по 22.01.2026 пеню у розмірі 104 876,10 грн та штраф у розмірі 48 942,18 грн.
Приймаючи рішення суд виходить з наступного:
Згідно із статтею 11 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) підставами виникнення прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. Правочин за приписами статті 204 ЦК України є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Положеннями статей 627, 628 ЦК України визначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Частиною 1 статті 509 ЦК України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати Від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до частини 2 статті 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 626 ЦК України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.
Укладений між сторонами Договір за своєю правовою природою є договором підряду на проектні та пошукові роботи.
Відповідно до статті 887 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов`язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов`язковим для сторін з моменту його затвердження замовником. Підрядник зобов`язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника (стаття 888 ЦК України).
Відповідно до приписів статті 890 ЦК України підрядник зобов`язаний : 1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором; 2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 3) передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт; 4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам; 5) гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.
Згідно статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Частиною першою статті 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.
Відповідно до статті 599 ЦК України господарське зобов`язання припиняється, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.
Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).
Стаття 611 ЦК України передбачає, що у разі порушення зобов`язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом.
Статтею 612 ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, якщо він не почав його виконувати або не виконав його у строк, встановлений договором.
Суд зауважує, що у разі здійснення підприємницької діяльності відповідач має усвідомлювати, що така господарська діяльність здійснюється ним на власний ризик, особа має здійснювати власний комерційний розрахунок щодо наслідків здійснення відповідних дій, самостійно розраховувати ризики настання несприятливих наслідків в результаті тих чи інших її дій та самостійно приймати рішення про вчинення (чи утриматись від) таких дій. Така правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 02.07.2019 у справі №910/15484/17, а також у постанові Верховного Суду від 13.11.2018 у справі №910/2376/18.
Настання несприятливих наслідків в господарській діяльності юридичної особи є її власним комерційним ризиком, на основі якого і здійснюється підприємництво.
Відповідно до частини 1 статті 546 ЦК України виконання зобов`язання, зокрема, може забезпечуватися неустойкою.
За приписами ч. 1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).
Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання (ч. 2 ст. 549 ЦК України).
Судом встановлено, що 11.08.2025 між Міністерством оборони України (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС» (далі - Виконавець) укладено Договір на виконання робіт з виготовлення проєктної документації № 220/71/33, відповідно до умов якого у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання перед Замовником виконати роботи з виготовлення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ, військове містечко № 54» Код ДК - 71320000-7 (далі - Роботи), у тому числі проходження експертизи проектної документації з отриманням позитивного експертного звіту, на основі Завдання на проектування (Додаток 5) до Договору, що надається Замовником Виконавцю. 
Зміст і виконання окремих робіт та етапів визначаються Завданням на проектування (Додаток 5) та Календарним планом виконання робіт (Додаток 3). що є невід`ємною складовою частиною Договору. Проектна документація розробляється в одну стадію: - «Робочий проект» (РП) згідно з ДБН. 
Пунктом 2.1. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 визначена договірна ціна Робіт у розмірі 699 174,00 грн, зокрема ПДВ 20% 116 529,00 грн. 
Умовами Договору та Додатком № 3 до вищезазначеного Договору встановлено, що строк виконання робіт у цілому за Договором та кожного етапу визначається в Календарному плані виконання робіт (Додаток 3) та становить 90 календарних днів з дати підписання Договору та надання вихідних даних. 
Однак, відповідачем були порушені умови Договору № 220/71/33 від 11.08.2025 в частині строків виконання робіт за Договором. 
Доказів протилежного матеріали справи не містять.
Умовами Договору, зокрема п.п. 6.4. - 6.5. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025, сторони передбачили, що за порушення строків виконання будь-якого окремого виду робіт за Договором та строків закінчення виконання робіт, зазначених у Календарному плані виконання робіт, Виконавець сплачує Замовникові пеню у розмірі 0,1% від Договірної ціни, за кожен день такого прострочення. Також за порушення строків виконання зобов`язань понад тридцять календарних днів- -додатково штраф у розмірі 7% ціни Договору. 
Поряд із цим, суд констатує, що матеріали справи не містять доказів підписання сторонами Додаткової угоди до Договору № 220/71/33 від 11.08.2025, в якій сторони погодили перегляд вищезазначених строків виконання робіт, у відповідності до п. 4.5. Договору № 220/71/33 від 11.08.2025.
Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Положеннями статті 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Відповідно до частини 1 статті 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Перевіривши наданий позивачем розрахунок заявлених до стягнення штрафних санкцій, судом встановлено, що останній є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а обраховані позивачем суми пені - 104876, 10 грн та штрафу - 48942, 18 грн. є арифметично правильними в силу чого заявлені вимоги підлягають задоволенню.
Відповідачем належними доказами обставин, на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог, не спростовано.
З огляду на вищевикладене, дослідивши всі обставини справи, перевіривши їх наявними доказами, судом встановлено обґрунтованість заявленого позову.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 233, 236-238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити. 
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ СЕРВІС» (адреса: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 72; код ЄДРПОУ: 31065419) на користь Міністерства оборони України (адреса: 03168, м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6; код ЄДРПОУ: 00034022) 104 876,10 грн - пені та 48 942,18 грн - штрафу за Договором № 220/71/33 на виконання робіт з виготовлення проєктної документації від 11.08.2025 та судовий збір у розмірі 2 662,40 грн.
Видати наказ після набрання цим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення може бути оскаржене у строки та порядку, встановленому розділом ІV ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписане 11.05.2026. 

Суддя Світлана ПОГРІБНА