ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
79014, місто Львів, вулиця Личаківська, 128
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.09.2026 Справа № 914/2243/26 
За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Благо Буд», м. Івано-Франківськ,
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Вест Рей Плюс», м. Львів,
про: стягнення 155 025 грн.
Суддя І. Б. КОЗАК
Без виклику сторін.
На розгляд Господарського суду Львівської області подано позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Благо Буд» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Вест Рей Плюс» про стягнення 155 025 грн.
Ухвалою суду від 20.07.2026 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.
Правова позиція позивача.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на виконання умов Договору підряду № 27/24/п-ББ від 18 січня 2024 року позивачем було сплачено на рахунок відповідача 155 025 грн авансу. Згідно умов договору відповідач був зобов`язаний виконати роботи за договором підряду до 15.03.2024, однак станом на дату подачі позову так їх і не виконав, у зв`язку з чим позивач просить суд про стягнення з відповідача на його користь суму сплаченого ним авансу в розмірі 155 025 грн.
Попередній розрахунок судових витрат:
- 2662,4 грн - сума сплаченого судового збору.
Правова позиція відповідача.
Відповідач відзиву на позов не подавав.
Обставини справи.
18 січня 2024 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Благо Буд» (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Вест Рей Плюс» (Підрядник, Виконавець) був укладений Договір підряду № 27/24/п-ББ.
Згідно з п. 1 Договору та Додатку № 1, Підрядник зобов`язувався виконати роботи із влаштування системи підсвітки фасаду, на об`єкті забудови: м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 79 (ЖК «Union», комерція, секція А,Б,В), а Замовник зобов`язувався прийняти і оплатити їх. 
Згідно додатку № 3 Договору, загальна вартість робіт (з матеріалами) становить 188 775,00 грн з ПДВ. 
Відповідно до Додатку № 3 до Договору, Позивач сплатив аванс у розмірі 100% від вартості матеріалів, що становить 155 025,00 грн з ПДВ. 
Оплата була здійснена згідно з платіжною інструкцією № 1157 від 13.02.2024 року. 
Згідно Додатку №2 передбачено, що Підрядник зобов`язаний завершити виконання всіх робіт, визначених в додатку №1 до даного Договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Підрядником авансового платежу. Підрядник зобов`язаний почати виконання робіт через один календарний день з дати будівельної готовності та отримання авансового платежу. 
Дата будівельної готовності: 20.01.2024 року. Замовник перерахував авансовий платіж, в сумі визначеній Договором, 13 лютого 2024 року. 
Станом на дату подання позову відповідач до виконання робіт не приступив, результат робіт Позивачу не передав. Роботи згідно договору підряду № 27/24/п- ББ не були виконані.
22.01.2026 позивачем на адресу відповідача було надіслано вимогу №117 про повернення авансу та сплату штрафних санкцій, однак відповіді не отримав.
Станом на дату винесення рішення відповідачем не подано доказів повернення авансових коштів.
Оцінка суду.
Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Зокрема, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.
Згідно статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків; договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.
Відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (стаття 627 Цивільного кодексу України).
Статтею 628 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погодженні ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Згідно статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
За умовами статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Частиною 2 статті 615 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.
Відповідно до статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2-4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів.
Статтею 843 Цивільного кодексу України передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.
Згідно статті 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.
Статтею 843 Цивільного кодексу України передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.
Відповідно до частини 1 статті 853 Цивільного кодексу України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.
Згідно статті 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Відповідно до частини 4 та частини 6 статті 882 Цивільного кодексу України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об`єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.
Згідно частини 1 статті 889 Цивільного кодексу України, за договором підряду замовник зобов`язаний сплатити підряднику встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.
Відповідно до частини 4 статті 879 Цивільного кодексу України оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об`єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.
Згідно статтей 526 та 525 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором.
Матеріалами справи підтверджується, що на виконання умов Договору підряду №27/24/п-ББ позивач перерахував на рахунок відповідача кошти у розмірі 155 025,00 грн згідно з платіжною інструкцією № 1157 від 13.02.2024 року. Призначення платежу: «оплата авансу на матеріал для влаштування підсвітки фасаду згідно договору №24/24/п-ББ від 18.01.2024, ПДВ (20%) 25837,5 грн».
Згідно Додатку №2 до Договору підряду Підрядник зобов`язаний завершити виконання всіх робіт, визначених в додатку №1 до даного Договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Підрядником авансового платежу. Підрядник зобов`язаний почати виконання робіт через один календарний день з дати будівельної готовності та отримання авансового платежу. 
Оскільки аванс був сплачений 13.02.2024, граничний строк виконання робіт настав 15.03.2024 року. Станом на дату подання позову відповідач роботи передбачені умовам договору не виконав, доказів протилежного суду не надав. Доказів повернення позивачу суми сплаченого авансу матеріали справи не містять. За таких обставин, суд дійшов висновку про задоволення позову про стягнення з відповідача 155 025,00 грн. 
Судові витрати.
Сплачений позивачем судовий збір покладається на відповідача повністю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 129, 219-221, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд
ВИРІШИВ:
1. Позовні вимоги задовольнити повністю.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Вест Рей Плюс» (адреса: 79040, Львівська обл., місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 367а; ідентифікаційний код: 45277873) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Благо Буд» (адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 35; ідентифікаційний код: 42410233) 155 025 грн авансу та 2662,4 грн судового збору.
3. Відповідно до ч. 1 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.
4. Апеляційну скаргу на рішення суду можна подати в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.
5. Інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за такою веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua.

Суддя Козак І.Б.